내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	폭염에 따른 본서 내진성능보강공사 일시중지 및 계약기간 변경계획

1. 관련근거

가. 폭염대응 국무총리 긴급지시(2018.8.1.)

나. 국토교통부 건설안전과-5731(2018.8.1.)“폭염 대응 국무총리 긴급지시 관련 건설현장 관리 철저 요청”

다. 시장 긴급지시사항 926호(2018.8.2.)

라. 시설안전과-11339(2018.8.2.)“폭염 대응 국무총리 긴급지시 관련 건설현장 관리 철저 요청”

마. 재무과-36665(2018.8.2.)“「폭염 관련 자치단체 계약집행운영 요령」통보 및 협조 요청”

바. 소방행정과-10421(2018.7.4.)“송파소방서 본서 내진성능보강공사 계약 체결 및 착공계 접수 보고”

2. 위와 관련 현재 본서 내진성능보강공사가 진행중에 있으나 최근 지속되는 폭염으로     근로자의 안전과 공사현장 재해 및 공사품질 저하가 우려되어 다음과 같이 공사를 일시     중지하고, 계약기간을 변경하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 송파소방서 본서 내진성능보강공사

나. 폭염 지속에 따른 공사 일시중지

○ 공사 일시중지 기간 :  2018.8.7.(화) ~ 8.13.(월) <7일간>

○ 공사중지사유 : 폭염에 따른 근로자 안전보호 및 재해예방(국무총리 긴급 지시사항)

다. 내진공사 계약기간 변경

○ 변경전 : 2018.7.3.~8.31.

○ 변경후 : 2018.7.3.~9.7.(7일간 연장)

○ 변경사유 : 폭염에 따른 공사 일시 중지기간 보전

붙임 1. 폭염 대응 국무총리 긴급지시 1부.

2. 폭염 관련 자치단체 계약집행운영 요령」통보 및 협조 요청 1부.

3. 폭염 관련 자치단체 계약집행운영 요령 1부.

4. 송파소방서 본서 내진성능보강공사 계약서 1부.  끝.

담당자	강일식		장비회계팀장	고석봉		소방행정과장	이미자		소방서장	08/06 代이미자
협조자
시행	소방행정과-12297	(	2018.8.6.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로 51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-403-4119	/전송	02-430-8119	/	air437@seoul.go.kr	/	부분공개(5)