투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설사업관리용역 설계변경에 따른 변경계약 의뢰

우리부에서 시행 중인 ‘월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리) 용역’에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리) 용역

2. 용역규모

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계 : 연결로 5개소, 지하차도 변경 등

- 월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치 설계 : 연결로 4개소 설치

3. 용 역 자 : (주)제일엔지니어링

4. 설계변경내역                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
용역금액	125,235,000	162,235,000	증)37,000,000
용역기간	'17.8.11.~'18.9.30.	'17.8.11.~'18.10.31.	증)31일

5. 설계변경사유 : 월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설계 과업 추가

6. 예산과목 : (교통사업특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 월드컵대교건설, 감리비(401-02)

붙임 :  1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.(원본 별도송부).  끝.

	토목부장
주무관	김동수		토목설계과장	안규홍		토목부장	08/06 김영수
협조자
시행	토목부-13748	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)