문서번호	문화비축기지관리사무소-1792
결재일자	2018.8.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
시민문화기획팀장		문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
이지선		이광준	08/06 代문인기
협조

문화비축기지 모두를 위한 시장 운영사업 계약변경 검토보고

2018. 8.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 모두를 위한 시장 운영사업

계약변경 검토보고

문화비축기지 모두를 위한 시장을 운영함에 있어 방문 시민들을 위한 프로그램 정보 제공을 위한 안내 설비 보완이 필요하여 계약 변경하고자 함

□ 용역개요

○ 용역명 : 문화비축기지 모두를 위한 시장 운영사업

○ 용역내용 : 모두를 위한 시장 기획 및 운영

○ 용역기간 : ’18.6.8.~11.30.

○ 계약금액 : 금76,000천원(금칠천육백만원)

○ 계약업체 : 문화로놀이짱(대표 김정석 오아름)

□ 계약변경 내용

○ 변경사유 : 시민 정보제공을 위한 안내 설비 보완에 따른 예산 변경

○ 변경내용

구분	변경내용		사업비 변경(천원)
	당초	변경	당초	변경	증감
사업진행비	안내시설 없음	안내시설 설치	69,090	79,090	증) 10,000
부가가치세			6,910	7,910	증) 1,000
총계			76,000	87,000	증) 11,000

□ 보고자 의견 및 조치계획

○ 문화비축기지 입구에 프로그램 정보를 제공할 수 있도록 안내게시판을     설치, 프로그램 추진에 만전을 기하여 준공 처리하고자 함

붙임 : 변경내역서 1부.  끝.