투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(920공구 , 총괄9회 및 10차1회)

우리본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』에 대하여 책임감리사로부터 총괄9회 및 10차1회에 대한 변경계약 요청이 있어 아래와 같이 시행코자 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

나. 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1개사

다. 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)

라. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	공사비			계약기간		비고
	당 초	변 경	증감	당 초	변 경
총괄 9회	159,474,424	161,247,861	증)1,773,437	‘09.12.31 ~‘18.12.31	변경없음
10차 1회	13,637,224	15,410,661	증)1,773,437	‘18.02.09 ~‘18.12.31	변경없음

※ 예산 구분 내역(총괄9회 및 10차1회)

(단위 : 천원)

구 분	공사비(당초)		공사비(변경)		비 고
총괄 9회	159,474,424		161,247,861		증)1,773,437
	158,102,828 (특별회계)	1,371,596 (세입세출)	159,212,168 (특별회계)	2,035,693 (세입세출)	1,109,340 (특별회계)	664,097 (세입세출)
10차 1회	13,637,224		15,410,661		증)1,773,437
	12,914,628 (특별회계)	722,596 (세입세출)	14,023,968 (특별회계)	1,386,693 (세입세출)	1,109,340 (특별회계)	664,097 (세입세출)

마. 변경 사유

○ 광역상수관 이설공사 변경 금액 반영(저촉되는 시상수관(D500, D700) 이설공사비)

○ 환기덕트 돌출부 중앙분리대 위치 이전 관련 설계 반영

바. 예산과목

○ 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 세입세출외 현금 : 광역상수도 이설공사(한국수자원공사 수탁공사 분)

붙 임 : 검토보고서 등 관련 자료 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄상민		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	08/06 정대현
협조자	주무관	김용선		주무관	노권호		홍보예산과장	代황덕연
경리과장	이현숙
시행	도시철도토목부-9529	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개