투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차2회) 긴급 변경계약 의뢰

1. 도시철도토목부-9593호(2018.8.7)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차)』에 대하여 아래와 같이 긴급으로 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)용역)(5차)

나. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

다. 용역금액 : 금22,000천원

라. 용역기간 : 2017.12.15. ~ 2018.08.08

마. 변경내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총괄	용역금액	2,312,106,000	2,312,106,000	-	변경없음
	용역기간	2015.03.13. ~ 2019.04.30	2015.03.13. ~ 2019.04.30	-	변경없음
5차 (2회)	용역금액	22,000,000	22,000,000	-	변경없음
	용역기간	2017.12.15. ~ 2018.08.08	2017.12.15. ~ 2018.09.30	증 53일

바. 변경사유 : 고덕교 특정제품(공법) 선정심사위원회 심의일정 연기, 설계자문회의 개최 및 보완기간 필요에 따른 용역기간 연장

사. 예산과목 : 도로건설, 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비및감리비, 시설비(금22,000,000원)

광역철도건설(교통개선분담금), 광역철도건설사업(교통개선분담금), 하남선(5호선연장) 광역철도건설(교통개선분담금), 시설비및부대비, 감리비

광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업(광역교통시설특별회계), 하남선(5호선연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설비및부대비, 감리비

붙임 : 1) 방침결정 1부.

2) 관련서류(변경설계서, 합의각서 포함) 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	정병구		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	08/07 정대현
협조자
시행	도시철도토목부-9594	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/
전화	02)300-8354	/전송	02)300-8364	/	basewaa007@seoul.go.kr	/	대시민공개