문서번호	도시철도토목부-9593
결재일자	2018.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
정병구		윤방식	08/07 정대현
협조

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(5차2회)』

건설사업관리용역 기간 연장 검토보고

2018. 08.

서울특별시 도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(5차2회)』

건설사업관리용역 기간 연장 검토보고

“고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)용역” 수행중 과업수행기간 부족사유로 용역기간 연장이 필요함에 따라 검토결과를 보고 함.

※ 관련문서 : 대한(철도) 제18-174호(2018.08.07)

1

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)용역)(5차)

❍ 용역개요 : 고덕교 확장         폭 20→21.2m, 연장 40m

고덕보도교 신설 1교) 폭 4m 연장 56m, 2교) 폭 4m 연장 58m

❍ 용역금액 : 22,000천원

❍ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 이우정 외 2

❍ 용역기간 : 2017.12.15. ~ 2018.08.08.

❍ 건설사업관리용역 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	1~4차(준공)	5차(진행중)	6차(진행중)	비 고
용역기간	2015.03.13. ~ 2019.04.30.	2015.03.13. ~ 2017.12.22.	2017.12.15. ~ 2018.08.08.	2017.12.23. ~ 2019.04.30
용역비	2,312,106	1,499,101	22,000	791,005

2

추 진 현 황

❍	'15.03.13.	:	총괄 및 1차 용역 계약
❍	'15.03.13.~'17.12.22.	:	1~4차 용역 시행(완료)
❍	'17.12.15.~'18.08.08.	:	5차 용역 시행(진행)
❍	'17.12.23.~'19.04.30	:	6차 용역 시행(진행)

3

보 고 내 용

❍ 과업수행 기간부족으로 용역기간 연장처리 필요

- 세부 일정별 기간부족 일수

구 분	연 장 사 유	소요일정	부족일수
특정제품 심의	고덕교 특정제품(공법) 선정심사위원회 심의일정 연기	2018.08.09 ∼ 2018.09.15	38 일
설계 자문회의	설계자문회의 개최 및 보완 기간필요 (외부전문가 및 동부도로사업소 등)	2018.09.16 ∼ 2018.09.30	15 일
계			53 일

4

조 치 계 획

❍ 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사를 위하여 시행중인 실시설계(보완)용역에 대한 교량설계 품질확보는 반드시 필요한 사항인 관계로,

❍ 특정제품(공법) 심의 및 설계 자문회의 등의 부족일수를 반영하여 아래와 같이 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차2회)」를 연기토록 계약부서(총무부)에 긴급으로 의뢰코자 함.

❍ 계약금액 및 계약기간 변경내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 (감)	비고
총 괄	계약금액	2,312,106	2,312,106	변경없음
	기 간	2015.03.13. ~ 2019.04.30	2015.03.13. ~ 2019.04.30	변경없음
5 차 (2 회)	계약금액	22,000	22,000	변경없음
	기 간	2017.12.15. ~ 2018.08.08	2017.12.15. ~ 2018.09.30	(증 53일)

붙임 : 변경계약 요청서(변경설계서, 합의각서 포함) 각 1부. 끝.