문서번호	정보자원운영과-5429
결재일자	2018.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정보자원운영과장	데이터센터소장	정보기획관
전성권	김기항	김현규	08/08 김태균
협 조
	기획관리과장		김안철
	인터넷통신과장		황기원
	클라우드센터운영과장		박복수

2019년 정보자원 통합 사업 추진 계획

2018. 8.

정보기획관

(데이터센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 정보자원 통합 사업 추진 계획

정보자원의 효율적인 공동 활용과 통합 IT인프라 환경 구축을 위해 『2019년 정보자원 통합』사업을 추진하고자 함.

1		개 요

□ 추진근거

❍ 정보자원 통합 및 인프라 구축 개선 계획(‘08. 8.11, 국장방침)

❍ 서울시 IT자원(H/W) 예산편성 개선 계획(‘15. 6.10, 국장방침)

❍ 서울특별시 정보화 기본조례 제29조(통합센터 운영)제3항

□ 정보자원 현황

(2018. 6.30. 기준)

구 분	계	전산장비	정보통신	정보보호	기반시설	비고
계	*****	*****	***	***	***
데이터센터	*****	*****	***	***	***
클라우드센터	***	***	***	**	***

※ ******************************************************

□ 추진실적(최근 3년)

❍ 2016년 정보자원 통합인프라 구축(‘16.12.15)

- 47개부서 노후장비교체 및 신규사업 자원 통합

***********************************************************

*********************

❍ 2017년 정보자원 통합인프라 구축(‘17.12.25)

- 43개부서 노후장비 교체 및 신규사업 자원 통합

**********************************************************

**********************

❍ 2018년 정보자원 통합인프라 구축(‘18.12.17)

- 29개부서 노후장비 교체 및 신규사업 자원 통합

******************************************************

**********************

2		2019년 추진계획

□ 추진방향

❍ 내구연한 경과(2012년 도입장비) 노후장비 우선 교체

❍ 장애시 파급효과가 큰 주요 업무시스템 이중화 구성

❍ 기존자원 공동활용, 가상화 등으로 신규 장비 도입 최소화

❍ 오픈소스의 운영체제(OS) 및 데이터베이스(DBMS) 도입 활성화

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 정보자원 통합 사업

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 소요예산 : *******************

❍ 사업내용 : ******

- 노후장비 교체 : ****************************

- 신규장비 구매 : ****************************

- 인프라 보강   : **************************

□ 장비도입 세부내역

❍ 내구연한 노후 장비 교체 : **식

도입년도 계	2009	2010	2011	2012
**	*	**	**	**

- 14개부서 노후장비 교체

****************************

************************

❍ 신규 사업 장비 구매 : **식

- 평생교육과 등 16개부서 20개 신규 자원 통합 사업

**************************************

************************

❍ 인프라 장비 보강 : **식

- 클라우드센터  및 프론트오피스 온라인 소산, 패스워드관리시스템

****************************

************************

3		소요예산

□ **************************

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산 (A)	2019년 예산(안) (B)	중감 (B-A)	세부내역 (증감사유)
합 계	**********	*********	**********
정보자원 통합관리	**********	*********	**********	******************** ******************** *********************
	******************************** ******************************
	*****	*****		********************
	*****	*****		******************

□ 예산과목

(단위 : 천원)

부서명	정책사업명	단위사업명	세부사업명	통계목	금 액
데이터센터 기획관리과	정보서비스의 안정적 운영	시스템 장비 교체 및 보강	정보자원 통합관리	계	*********
				사무관리비	*****
				시책업무추진비	*****
				자산 및 물품취득비	*********

4		향후일정

❍ 정보자원 통합 구축 세부 계획 수립 : 2019. 1.

❍ 사전절차 수행(계약심의 등)        : 2019. 2. ~  3.

❍ 사업발주 및 입찰공고              : 2019. 4. ~  5.

❍ 제안서평가 및 계약체결            : 2019. 6. ~  7.

❍ 정보자원 통합 구축 사업 추진      : 2019. 7. ~ 12.

붙임 : 2019년 정보자원 통합 사업 현황 1부. 끝.