문서번호	산지방재과-7740
결재일자	2018.8.8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
신정림		정상모	08/08 김영삼
협조
	주무관		손창민

- 시민의 숲 교양시설 조성공사 -

유가족 요청사항 회의결과 및 준공기한 연기 검토 보고

2018. 8.

푸른도시국

(산지방재과)

- 시민의 숲 교양시설 조성공사 -

유가족 요청사항 회의결과 및 준공기한 연기 검토 보고

우면산 산사태 희생자 추모비 설치 후 유가족 측과 현장 합동회의한 결과, 부대시설 설치 요청이 있어 유가족 민원을 해소하고 시장 요청사항 이행 완료를 위해「시민의 숲 교양시설 조성공사」의 준공기한을 연기코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시민의 숲 교양시설 조성공사

○ 위    치 : 서초구 양재동 시민의 숲

○ 공사기간 : 2018.5.29. ~ 2018.8.10.

*************************

************************

□ 유가족 등 회의개요

○ 일    시 : 2018.8.6.(월) 11:20~12:30

○ 장    소 : 시민의 숲

○ 참 석 자

- 유가족 **********

- 서울시 : 사면정비팀장 외 2명

- 설계사 ************

- 시공사 : 현장대리인 외 1명

○ 추진경위 : ‘18.7.27. 7주기 추모행사 당시 추모비에 대한 유가족들의

이의 제기 및 면담 요청

○ 회의내용 : 추모비 앞 공간에 희생자 성명을 기록할 수 있는 시설 추가 등

□ 유가족 요구사항에 대한 회의결과

*****************************************************************************************************************************************************************************************  *************************************   ******************************************

*******************************************************************************************************************************************************

************************************

○ 기타 질의 및 건의

․바닥포장을 목재시공한 사유

⇒ 목재는 지속적인 유지관리(오일스테인 칠 등)가 필요하며 화강석 바닥포장에 비해 내구성과 유지관리 측면에서 불리하나, 자연친화적이고 따뜻한 분위기의 공원시설물로서 주변 경관과 어울리도록 한

설계 의도에 따라 목재 중 내구성이 강한 재질(이페)를 선정함

․유지관리 철저 요청

⇒ 본 공사가 준공되면 추모비 등 시설물 일체를 동부공원녹지관리사업소에 이관하여 향후 공원 측에서 유지관리할 것임

******

************************************.

************************************

***************************************       **************************************

**************

□ 준공기한 연기 검토

○ 준공기한 연기

구 분	기 존	변 경	비 고
공사기간	2018.5.29.~2018.8.10	2018.5.29.~2018.8.31.	증 21일

○ 연기에 따른 귀책소재 : 서울시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 준공기한 연기사유

유가족 측의 추가 요구사항에 대한 설계안 작성, 유가족과 세부내용 조정, 시공사의 제작․설치 등에 상당기간이 소요되고, 추가 공종에 대한 설계변경을 위하여 위와 같이 준공기한을 연기하고자 함

□ 행정사항

○ 준공기한 연기 의뢰 : 산지방재과 → 재무과

□ 현황사진

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.