투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제목	2019년도 세출예산 편성 요청(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사)

1. 노원구청 토목과-7210호(2018.05.25.) 및 토목과-7811호(2018.06.08.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리 본부에서 시행 중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사』에서 발생한 아파트 주민 요구사항 반영 및 시설물 인수인계 기관(노원구) 요청사항 등을 반영하고자 2019년도 세출예산 편성을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 2019년도 세출예산 편성요청 현황

(단위 : 백만원)

세부사업명	‘19년도 예산편성 요청액	편성사유
중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사	1,000 (시설비 850 / 감리비 150)	○ 민원 발생사항 조치 - 교각(P1) 주변 환경 정비(도색 등) - 겨울철 빙판 방지 캐노피 설치 등 - 시설비 630백만원 증가 ○ 시설물 인수인계 기관 요구사항 반영 - 자전거 통행로 확보 요청 등 - 교량 점검시설 설치 등 - 월계역 앞 도로 개선 요청 등 - 시설비 220백만원 증가 ○ 공사 기간 연장(4개월) (당초) 2018.11. 준공 → (변경) 2019.04. 준공 예정 - 주민 요구사항 반영 - 시설물 인수인계 기관 요구사항 반영 - 철도보호지구 내 행위신고 등 철도시설공단 협의 기간 소요 - 감리비 150백만원 증가

나. 예산과목 : 하천관리과(일반회계), 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비,
중랑천 초안산 앞 보행교량 설치, 시설비 및 감리비

붙임 : 1. 필요 예산 현황 보고 1부.

2. 시설물 인수인계 기관 요구사항 1부.

3. 민원발생 사항 1부.

4. 철도시설관리공단 협의 내용 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	08/09 김영수
협조자	주무관	노순재		주무관	김동현
시행	토목부-13950	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)