문서번호	시설과-1823
결재일자	2018.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	08/09 안수연
협 조

「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」

준공기한 연기 검토 보고

2018. 8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」

준공기한연기검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사」와 관련하여 준공연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사

○ 공사기간 : 2018. 5. 18 ~ 8. 16.

○ 총공사비 : 금276,226,330원(금이억칠천육백이십이만육천삼백삼십원)

(도급액 : 금172,134,330원/ 관급자재 : 금104,092,000원)

○ 도 급 자 : ㈜케이지에코 대표 윤창일

○ 공사내용 : 연못데크, 연결 목재데크, 목계단 등 시설물 정비

□ 검토내용

○ 연기사유

- 전국 대부분 지역의 최고기온이 35도 내외를 기록하는 등 폭염이 기승을 부리고 있어 현장 근로자 안전을 고려한 공사 기간 연장 필요

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2018.05.18. ~ 2018.08.16.

- 변경 : 2018.05.18. ~ 2018.09.10.

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

○ 계약부서에 준공기한 변경 계약 요청

○ 본공사 일정에 맞춰 관급자재(휀스, 등의자) 납품기한 변경 요청