투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사)

1. 시설과-1823(2018.8.9.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 보라매둘레길 진출입로 확충 및 노후 산책로 정비공사 관급자재 구매

나. 관급자재 현황

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
22066020	울타리	H1,100XW1,500	경간	121
22317684	등의자		개	13

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2018.8.15.(울타리, 등의자)

- 변 경 : 2018.9.10.(울타리, 등의자)

라. 연기사유 : 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 실정사항 검토 보고서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	송복식		시설과장	08/09 진병규
협조자
시행	시설과-1826	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개