문서번호	물재생계획과-9960
결재일자	2018.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배수설계팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
이승주	심형보	하상문		08/09 배광환
협 조

망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 검토 보고

2018. 8.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토 보고

34개 침수취약지역(중점관리지역)으로 관리되고 있는 망원배수구역의 침수해소를 위해 시행중인「망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 과업(준공)기한을 연기하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역

❍ 용역기간 : ’16.12.1.~’18.8.12.(2차:‘17.9.1.~’18.8.12.)

❍ 용 역 비 : 1,389,300천원(2차:270,800천원)

❍ 용 역 사 : ㈜한국종합기술, ㈜동해종합기술공사, ㈜동명기술공단

❍ 과업내용 : 망원배수구역 배수개선대책 수립(A=608ha)

Ⅱ		추진경위

❍ ’16.12. 1. : 용역착수

❍ ’17. 1.11. : 착수보고회 개최

❍ ’17. 1.~2. : 망원1·2펌프장 현장조사 및 개선방안 검토

❍ ’17. 3.~6. : 배수개선방안 외부전문가 자문(4회)

❍ ’17. 7. 3. : 중간보고 및 자문회의 개최

- *********************************************

❍ ’17. 8.31. : 1차분 준공

❍ ’17. 9. 1. : 배수개선대책(안) 변경 보고

- *************************************************

❍ ’17.11. 2. : 서대문구청장 보고

❍ ’17.11.20. : 시·구 합동회의(서울시 및 자치구 국·과장)

❍ ’18. 1.30. : 마포구 부구청장 보고

❍ ’18. 3.20./7.27. : 빗물펌프장 유지관리방안 검토회의(서울시 및 자치구 국·과장)

Ⅲ		변경내용

❍ 용역비 및 과업내용 : 변경 없음

❍ 용역기간

구 분	당 초	변 경	비고
총차	’16. 12. 1.~’18. 8. 12.	’16. 12. 1.~’18. 10. 19.
2차	’17. 9. 1.~’18. 8. 12.	’17. 9. 1.~’18. 10. 19.	68일 연장

❍ 귀책사유 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		변경사유

❍ 배수개선대책 실시설계 및 도시계획시설 결정 관련 자치구 협의 지연

- 빗물펌프장 설치부지 및 유지관리 방안 자치구 협의 중

- 빗물펌프장 주민편의시설 및 도시관리계획 입안 절차 자치구 협의 지연

❍ 자치구 협의 지연에 따른 주민설명회 개최 및 설계VE, 건설기술심의 등 행정절차 이행을 위한 추가 과업기간 필요

- 빗물펌프장 설치에 따른 주민설명회 개최(’18.9월 중)

- 설계자문, 설계VE 및 건설기술심의 등 행정절차 추진(’18.8.~9.)

Ⅴ		향후계획

❍ ’18.  8. : 자문회의

❍ ’18. 8.~9. : 설계VE 및 건설기술심의

❍ ’18. 10. : 최종보고 및 용역준공

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 용역 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.