문서번호	운영과-1279
결재일자	2018.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
김광모		최종인	08/10 정흥순
협 조
	주무관			조정호

2018년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획(3차)

난지물재생센터

(운영과)

2018년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획(3차)

물재생 1,2처리장 고장 기계설비에 대하여 2018년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)에 따라 다음과 같이 보수하여 하수처리에 철저를 기함.

사업개요

- 사 업 명 : 2018년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)

- 사업기간 : 2018. 3. 6 ~ 12. 31

- 사업금액 : 414,636,100원

- 계약업체 : ㈜한국표준환경기술 대표 정창진

작업내용

번호	위치	공사내용	근거	비고
1	종침 3계열	통합반류수조 C호 수중펌프 및 체크밸브 교체	운영과-1271	붙임1
2	종침 3계열	스컴 집수정 수중펌프(1대) 교체	〃	〃
3	초침 2,3계열	지하관랑 조명설비 교체 및 선로정비	〃	〃
4	1,2송풍기동	냉각수 보충수 배관 교체	〃	〃
5	종침1,3계열	1-3, 1-5, 3-3호 반송펌프 체크밸브 교체	〃	〃
6	종침 4계열	4-9 반송펌프 토출측 레듀샤 교체	운영과-1272	붙임2
7	#2오수펌프장	수중펌프 교번운전을 위한 PLC 수정	〃	〃
8	초침 5,6계열	5-7, 6-3, 6-5지 지배수 후 지청소	〃	〃
9	초침 2,3계열	2-4, 3-5~8지 지청소 및 슬러지수집기 정비	운영과-1275	붙임3

행정사항

- 2018. 9. 14일한 완료

- 지침서 및 내역서에 의한 시공여부 확인 철저

- 공종 및 물량 변동시 정산 후 설계변경 시행

- 완료 후 내역서 및 사진첩 제출

첨부 : 관련 보고서 3부.  끝.