문서번호	건축부-11337
결재일자	2018.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
남광연	차무흥	08/10 임인구
협 조
	주무관		시희식

『스페이스살림 조성공사』폭염기간 옥외공사 현장운영계획 검토 보고

2018. 8.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『스페이스살림 조성공사』

폭염기간 옥외공사 현장운영계획 검토 보고

「스페이스살림 조성공사」에 대해 건설사업관리자로부터 폭염기간 옥외공사 수행을 위한 현장운영계획 승인 요청건에 대한 검토 보고 임

1		공사개요

공 사 명 : 스페이스살림 조성공사

위    치 : 동작구 대방동 340-3외3필지

규    모 : 지하2/지상7층, 연면적 17,621.33㎡, 교육연구, 근생, 노유자시설

공사기간 : 2017. 12. 26 ~ 2020. 6. 25(총차)

2017. 12. 26 ~ 2018. 9. 30(1차)

공 사 비 : **************

**************

시 공 사 : (주)호반건설,제이에스타워(주),신성종합조경(주)

감 리 자 : ㈜희림종합건축사사무소, ㈜토문엔지니어링건축사사무소

현공정률 : 16% (터파기 및 토사반출)

2		추진경위

‘17. 12. 26 : 공사착공

‘18.  2. 10 : 기존건물 철거

‘18.  2. 20 : 파일공사 착수

‘16. 07. 25 : 부지정지작업완료 및 흙막이 공사 착수

‘18.  4. 19 : 굴착 공법변경 등에 따른 공기연장 요청(1차)

‘18.  7. 23 : 사토장 변경에 따른 공기연장 요청(2차)

3		옥외작업 현장 운영계획

관련근거 : HTSC 1808-14호 폭염기간 현장운영계획에 대한 승인 요청

폭염경보 발령시 현장 운영 방침

- 폭염경보 발령시 오후(12시 이후) 실외작업 중지

※ 국무총리 긴급지시(8.1) 시장 긴급지시 926호(8.2)에 따른 실외작업 중지 강력 시행

- 불가피한 경우만 예외 인정(건설중장비 운영현장, 필수공정 작업 등)

※ 불가피한 작업이 필요한 경우 사전에 발주처의 승인을 받도록 조치 강화

옥외 작업 중지 예외 인정 사유

- 토사 반출 작업은 굴삭기와 덤프트럭 등 건설장비 운영작업으로 장비 운전원은 장비 내부의 에어컨 가동 / 신호수 근로자는 교대 근무 시행 등의 대책을 통해 온열 환자 발생 방지 가능함

- 토사 반출 공정은 주공정(CP)이므로 작업 중단 등으로 공정 지연시 후속공사의 안전 및 품질관리에 차질이 예상됨

*********************************************************************

구 분	운반횟수	토사반출량	계획량	작업일수
정상작업시(8H)	**	*****************	*******	***
단축작업시(6H)	****	******************		***
중 감	*******	*******		******

- 건설중장비 운영현황

중장비	규격	대수	중장비 임차료 (V.A.T제외)	2시간 단축시 임차료 손실
				금 액	합 계
굴삭기	****	**	**********	********	************
	****	**	**********	********
덤프트럭	***	***	**********	**********

*************************************************************************************************

- 사토장이 오전 7시부터 운영됨에 따라 작업시간을 최대한 조정하여 오전 6시~오후 3시 작업 가능(폭염시 작업: 1시~3시, 2시간 해당, 점심시간 1시간 제외)

작업 근로자별 대책

- 건설 장비 운전원 : 건설 장비 내부 에어컨 가동

- 현장 내부 신호수 : 당초 2명 → 4명으로 변경하여 30분 단위 교대 근무 / 휴식시 근로자 휴게소 에어컨 가동

- 현장 외부 신호수 : 당초 1명 → 2명으로 변경하여 30분 단위 교대 근무 / 휴식시 경비실 에어컨 가동

기타 폭염대비 대책

- 현장내 제빙기 가동, 근로자 휴게소 2개소 운영

- 공종 관리감독자 30분단위 현장 관리 및 온열 증상 여부 확인 실시

4		건설사업관리자 검토의견

현장 토사 반출작업이 폭염기간 작업 중단되는 경우 공정지연이 예상되고 이로인해 후속공사의 공사관리에 차질 발생 가능성 있음

폭염기간 실외 작업자에 대한 건강대책과 안전 작업계획을 세워 당 현장 근로자의 건강과 공정에 문제가 없도록 공사관리하겠음

5		처리의견

공정상 불가피한 경우의 예외 인정 사유(건설중장비 운영현장, 필수공정 작업 등)에 해당되므로 현장관리계획을 승인하고자 함

붙임 : 1) 폭염기간 현장운영계획 승인요청(건설사업관리자) 1부.  끝.