투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	어린이보호구역 내 노란신호등 설치 공사 작업지시(설치장소 변경)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「어린이보호구역 내 노란신호등 설치 공사」 추진 중 서부경찰서에서 설치장소 변경요청하여 검토한바, 그 내용이 타당하다고 판단되어 변경시행하고자 하니 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 추후 설계변경 검토보고 시 장소변경에 따른 물량 변경내용이 발생하니 내역서에 잘 반영될 수 있도록 주의깊게 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 어린이보호구역 내 노란신호등 설치 공사

나. 계약업체: 공사업체- ㈜빛나전기, 감리업체- 대영유비텍(주)

다. 공사기간: 8.6. ~ 8.30.

라. 변경사항: 설치장소 변경(은평구 녹번초교→은평문화예술회관),

물량 변경(보행등1면3색 2조 증)

마. 변경사유: 당초 위치가 어린이보호구역 외 지역임

바. 기타사항

- 굴착 및 교통통제 등이 필요시 해당 관계기관 협의 및 홍보 시행

- 교통관리 및 안전관리 철저

- 천재지변 및 기타 등의 사유로 작업기간 지연 우려 시 사전 협의 시행

붙임  설치장소 변경요청 공문(서부경찰서) 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김성균		기전과장	08/10 代윤석주
협조자
시행	기전과-7408	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개