위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	예산 재배정 요청관련 회신

1. 방재시설부-9839(2018.7.27.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」의 감리비 예산 재배정 요청과 관련 검토한바,   본 사업의‘18년도 예산은 하수도사업 특별회계의 공기업 회계 전환에 따라‘17년 사고이월 대상사업비를‘18년 사업비로 신규 편성한 사항이며,

3. 사업시행 중 귀 부서의 책임감리 용역기간 연기 및 감리원 휴일근무 대가 반영 등의 사유로 감리비 추가예산 요청에 따라,‘18. 5월 예산 변경을 시행 전액 기 재배정 하여 감리비 예산이 소진되어    예산잔액이 없음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 감리비 예산내역

(단위:천원)

통 계 목	당초 예산액	변경 예산액	기 재배정액	예산잔액
감 리 비	149,000	250,000	250,000	-

붙임 : 1. 예산 변경 방침서 1부

2. 예산 재배정(예산 변경) 공문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	양해선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	08/10 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-10554	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-3826	/전송	02)2133-1043	/		/	대시민공개