문서번호	시설관리과-16915
결재일자	2018.8.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
권영안	代권영안	김홍준	08/13 박영헌
협 조
	급수운영과장		이병운
	급수설비팀장		김찬모
	주무관		김승완
	주무관		양재덕

『2019년도 홍은배수지외 11개소』 정밀안전진단 및 정밀점검 추진계획

2018. 8.

서부수도사업소

『2019년도 홍은배수지외 11개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 추진계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의거 2019년도 홍은배수지외 11개소에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 계획을 수립, 구조물의 안정성을 확보하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 2018년 기술용역타당성 심사요청 안내(본부 시설관리과-6249호, ’18.7.25)

Ⅰ

추진 현황

점검 대상 : 12개소(정밀안전진단 3, 정밀점검 9)

배수지 : 8개소(정밀안전진단 2 , 정밀점검 6 )

연번	시 설 명	용 량	정밀안전진단	정밀점검	설치연도	비 고
1	홍은배수지	12,500㎥	-	○	1972년	급수운영과
2	연희배수지	2,000㎥	-	○	1961년	급수운영과
3	홍제배수지	500㎥	-	○	1986년	급수운영과
4	홍은3배수지	400㎥	-	○	1984년	급수운영과
5	자하문배수지	200㎥	-	○	1984년	급수운영과
6	증산배수지	60,000㎥	○	-	1991년	시설관리과
7	응암배수지	4,000㎥	-	○	1991년	시설관리과
8	수색배수지	500㎥	○	-	1976년	시설관리과

가압장 : 4개소(정밀안전진단 1, 정밀점검 3 )

연번	시 설 명	정밀안전진단	정밀점검	비 고
1	창천	-	○	급수운영과
2	홍은3	-	○	급수운영과
3	증산(배)	○	-	시설관리과
4	녹신	-	○	시설관리과

시행시기

2019년 4월 ~ 2019년 11월(상 ‧ 하반기 배수지 청소시 점검)

소요예산

사업비 : 139,062천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

Ⅱ

추진 계획

추진일정

2018년 8월  : 자료조사 및 설계서 작성

2018년 8월  : 기술용역타당성 설계심사 요청(본청 기술심사담당관)

2019년 3월  : 설계심사 결과에 의거 용역발주

2019년 4월 ~ 10월 : 정밀안전진단 및 정밀점검 용역시행

2019년 10월 ~ 11월 : 용역준공(최종 성과물 제출)

※ 최소 준공 1개월 전에 건설기술 심의 이행(서울특별시 건설기술심의위원

조례 제3조 및 같은 조례 시행규칙 제6조내지 제7조

용역방법

정밀점검, 안전진단 전문용역업체 계약 시행

Ⅲ

주요 진단(점검)및 방법

주요 추진사항

시험, 측정장비 및 육안조사등을 통한 시설물의 안전성 및 결함의 원인 등 조사, 분석하여 보강방법 제시

진단(점검)결과에 따른 보수ㆍ보강 시설개량, 하자보수등으로 배수지 기능 회복

진단(점검) 방법

사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

정밀안전진단에 필요한 설계도면, 시방서, 사용재료 내역 등 시공관련 자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

정밀 육안검사 및 진단 측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

시설물의 구조적, 기능적 상태 평가 및 안정성 평가와 이에 따른 종합평가

정밀안전진단 및 정밀점검 결과 평가에 따른 보수, 보강방법 제출

□ 정밀안전진단 : 시설물의 결함 정도에 따라 조사․측정․시험, 구조계산, 수치해석 등을 실시,분석․검토하여 안전성평가 결과를 결정하고. 또한 필요한 경우에는 구조물의 사용성, 내진성능등 평가결과 보수․보강이 필요한 경우에는 보수․보강방법을 제시

□ 정밀점검 : 시설물의 외관조사 및 측정․시험 결과와 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과의 상태평가 결과와 비교․검토하며 상태평가 결과를 결정 및 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야 한다.

보수, 보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

Ⅳ

행정사항

용역설계서를 작성하여 본청에 기술용역 타당성 심사를 의뢰후 그 결과를 본부 시설관리과에 보고

붙임 : 1. 2019년 기술용역타당성 심사요청안내(정밀안전진단 및 정밀점검 1부.

2. 2019년 정밀안전진단 및 정밀점검대상 1부.

3. 과거 정밀안전진단 및 정밀점검 시행 현황1부.

4. 용역설계내역서 1부.  끝.