문서번호	설비부-11256
결재일자	2018.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	08/13 권오식
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기 및 통신공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08.

도시기반시설본부

설비부

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기 및 통신공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

선행 공정인 토목공사(1차)가 준공기한을 연기조치************함에 따라 본 전기 및 통신공사의 당초 1차분 준공기한으로는 절대공기가 부족하기에 공사 기간을 다음과 같이 연장 조치하고자 검토 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

구 분	전기	통신	비 고
공 사 명	중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사	중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사
공사위치	성동구 자동차시장3길 64일원(중랑물재생센터내)
공사규모	-총인처리시설, 약품공급설비 -슬러지처리설비, 방류수 혼합설비 등	-총인처리시설 -유입펌프장 설비 등
공사기간	총차 `17.11.24.~`20.01.23. 1차 `17.11.24.~‘18.08.31.	총차 `17.11.27.~`20.01.26. 1차 `17.11.27.~`18.08.31.
계약금액	총차 금2,734,227,900원 1차 금350,453,000원	총차 금188,539,126원 1차 금9,866,000원	1차 (18년 예산)
계 약 자	㈜제이앤제이파워스 박재옥	㈜순성이엔씨 양재희
감 리 자	㈜천일, ㈜진전기엔지니어링	㈜천일, ㈜진전기엔지니어링

2		공사기간(1차분) 연장검토 내용

□ 관련근거

○ 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 준공기한 연기 검토보고

: 방재시설부-10263호(`18.08.07.)

→ 토목공사(1차) 준공기한 연기 조치(`18.08.30.→`18.12.10.)

○ 중랑물재생센터 총인처리시설 전기 및 통신 1차공사 준공기한 연기 검토 보고

: 중랑감 제18-202호, 중랑감 제18-203호(`18.08.13)

***************************

**********************************************************************************************************************

********************************************************

<공사현황>

공사장 전경(총인시설 토목-터파기)	공사장 전경(비총인시설 B계열-유량계)

□ 공사기간 연장내용

******

*************************************************************************************************************************************************

******

*************************************************************************************************************************************************

□ 귀 책 소 재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

3		조 치 계 획

**********************************************************************************

따로붙임 : 1. 토목공사(1차) 준공기한 연기검토 보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 검토의견서 1부. 끝.