문서번호	정보자원운영과-5532
결재일자	2018.8.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
고동수		代전성권	08/13 김현규
협조
	주무관		송상봉

차기 시금고 세입세출 중계서버 설치 계획

2018. 8.

데이터센터

(정보자원운영과)

차기 시금고 세입세출 중계서버 설치 계획

차기 서울시 제1금고 세입·세출 중계서버 인프라 구축에 적극 협조하여 원활한 시금고 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련문서

❍ 『시스템 입주 설치 작업 협조 요청(차기 1금고 세입세출 중계서버)』

(재무과-36898,‘18.8.3.)

❍ 입주검토 결과 회신(정보자원운영과-5237,‘18.8.1.)

□ 설치 개요

❍ 일   정 : '18.8.14(화) ~ 8.20(월)

❍ 설치장비 : **********************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

❍ 설치장소 : ***********

❍ 작 업 자 : 신한은행, LGCNS, HP 등 11인([붙임#1]참조)

❍ 주요작업내용

- 중계서버, 스토리지 H/W 설치 및 케이블 포설

- OS 및 DB 등 S/W 설치 및 이중화 구성

□ 구성도

*****

□ 상세 작업 내용

❍ 장비 입고 및 통신 케이블 포설 ……………………… 8.14.(화)

- 장비 입고 및 설치

· ******* : 기존 랙 여유 공간 활용 (**** #1 장착)

· ******* : 신규 랙 구축 (****#2 및 **** 장착)

- 케이블 포설

시스템명	목적지(위치)	용도	타입	라인
*********	***	서비스용	UTP	4
*******	***	서비스용	UTP	4
	********	백업용	UTP	2

❍ 시스템 가동 및 OS설치 ……………………………… 8.16(목)

- OS 설치

· ****************************

· ******************************

❍ HA 구성 및 DBMS 설치 ………………… 8.17(금) ~ 8.20(월)

- HA 구성 : *************************

- DBMS 설치 : *****************************

□ 향후 운영 계획

❍ 도입 장비에 대한 유지보수 및 장애처리는 신한은행에서 전담

- 도입 장비는 서울시로 관리전환 없이 신한은행 장비로 관리

- 장애 발생 시 신한은행에 전달하여 장애 조치

➡	현 우리은행 중계서버 운영방식과 동일

❍ 신규 시스템 개발에 따른 사전 테스트 지원

- 개발에 따른 테스트 및 부서 협조 요청 시 적극 지원

붙  임   세출인프라 구축계획서   1부.