투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 요청[중랑물재생센터 총인처리시설 전기 및 통신공사]

1. 우리 본부에서 시행중인 「중랑물재생센터 총인처리시설 전기 및 통신공사」에 대하여 준공기한(1차) 연기의뢰 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공사개요

구 분	전기공사	통신공사	비 고
공 사 명	중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사	중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사
공사기간	총차 : 2017.11.24.~2020.01.23. 1 차 : 2017.11.24.~2018.08.31.	총차 : 2017.11.27.~2020.01.26. 1 차 : 2017.11.27.~2018.08.31.
계약금액	총차 : 금2,734,227,900원 1 차 : 금350,453,000원	총차 : 금188,539,126원원 1 차 : 금9,866,000원
계 약 자	㈜제이앤제이파워스 대표 박재옥	㈜순성이엔씨 대표 양재희

나. 준공기한 연기내용

□ 공사명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사기간	당 초	변 경	증감	비 고
총차	2017.11.24.~2020.01.23.	2017.11.24.~2020.01.23.	변경없음	계약금액 변경없음 (선급금 없음)
1차	2017.11.24.~2018.08.31.	2017.11.24.~2018.12.10.	증)101일	계약금액 변경없음

□ 공사명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사

공사기간	당 초	변 경	증감	비 고
총차	2017.11.27.~2020.01.23.	2017.11.27.~2020.01.23.	변경없음	계약금액 변경없음 (선급금 없음)
1차	2017.11.27.~2018.08.31.	2017.11.27.~2018.12.10.	증)101일	계약금액 변경없음

다. 준공기한 연기사유

- 본 전기 및 통신공사의 선행공정인 토목공사 준공기한이 연기조치됨에 따라 후속 공정인 전기 및 통신 1차분 공사의 절대공기 부족으로 준공기한 연기 필요.

라. 귀책소재 : 발주처

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 공사기간 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	유병기		설비부장	08/13 권오식
협조자
시행	설비부-11283	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(5)