문서번호	정수시설과-2456
결재일자	2018.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		백상희	08/14 서대훈
협 조
	주무관			김금옥
	주무관			함인석

『1·4계열 응집·침전지 벽체 및 트라프 보수공사』

감독 수행 보고(1차)

2018.  8.

정수시설과

『1·4계열 응집·침전지 벽체 및 트라프 보수공사』

감독 수행 보고(1차)

1·4계열 응집·침전지 벽체 및 트라프 보수공사 감독업무 수행중 트라프 1개지 추가 공사가 필요하여 보고 드림

□ 계약현황

○ 공 사 명 : 1·4계열 응집·침전지 벽체 및 트라프 보수공사

- 공사규모 : 응집지 4개지, 침전지 3개지, 트라프 2개지

(시공면적 : 응집·침전지-5,619㎡, 트라프–772㎡)

○ 계약 금액 : 856,143천원

○ 계약 기간 : 2018. 6.26. ~ 12.29

○ 계약 업체 : ㈜ 와이씨산업개발 대표 박남재

□ 보고내용(트라프 1개지 추가 공사시행)

○ 당초 공사 계약수량이 응집지 4개지(정류실3), 침전지 3개지, 트라프 2개소로 계약하였으나 미 반영된 트라프 1개소 추가정비 하고자 함

- 미 반영된 응집·침전지내 정류실1개소(1계열3지), 트라프1개소(1계열6지)트라프, 정류실 정비시 약 15일간 아리수 생산중단 수반되므로

- 금회 시행중인 공사에 예산범위내 반영하여 1계열 6지 트라프 1개소 추가하고 응집지 1-3지내 정류실은 계약금액 초과로 불과 2019년 시행 하고자 함

※ 1·4계열 공사계획 및 현황

구분	계	1계열 3지	1계열 5지	1계열 6지	4계열 1지
침전지	3	‘17완료	1	1	1
응집지 (정류실)	4 (3)	1 (19년)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
트라프	2→3	‘17완료	1	0→1	1

○ 소요예산 검토

- 계약금액 증액없이, 계약내역에 계상된 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 등의 실비정산 금액이 당초 계약금액보다 감액되어 트라프 1개지를 계약금액 범위내에서 추가작업 시행가능

- 설계감액 예상비용 : 18,175천원(재경비 포함시 24,266천원)

소계	설계변경 감액(천원)
	건강 보험료	연금 보험료	노인장기 보험료	퇴직공제부금비	건설기계 대여보증금	산업안전 보건관리비
18,175	3,940	5,770	291	1,643	2,836	3,695

- 예상공사비(트라프1개 추가반영) : 852,170천원(계약금액 856,143천원)

□ 보고자 의견

○ 공사업체로 하여금 트라프 1개소를 추가 정비토록 하고, 설계변경시 반영하여 생산시설의 효율적 운영과 불용예산 감소를 최소화 하고자 함

별첨 : 보험금 및 트라프 1개지 추가 반영 공사비 내역 1부.  끝.