투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	변경걔약 의뢰[2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(서울체육회)]

우리사업소에서 시행중인「2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(서울체육회)」의 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(서울체육회)

다. 공사기간 : 2018. 5. 25. ~ 2018. 8. 22.

****************************************

마. 계약업체 : 용천엔지니어링(주) 대표 현정주

바. 변경사유 : 지장물(한전 공동구) 이전 지연 및 혹서기 토목공정 지연으로 절대 공기 부족

사. 변경내용 (※ 계약금액 변동 없음)

구 분	변경전	변경후	비 고
준공기한 연기	2018. 5. 25. ~ 2018. 8. 22.	2018. 5. 25. ~ 2018. 11. 30.

아. 예산과목 : 도시교통본부, 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 공사 설계변경 검토 보고서 1부

2. 관련공문 및 합의각서 각 1부

3. 설계변경 시행문 1부.  끝.

	기전과장
주무관	유정하		기전과장	08/14 곽희영
협조자
시행	기전과-3371	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5,7)