문서번호	방재시설부-10577
결재일자	2018.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		신용우	08/14 이임섭
협조

『서울기록원 건립공사(조경)』

관급자재 구매계획

2018. 8.

방재시설부

(조경시설과)

『서울기록원 건립공사』

관급자재 구매계획

우리 본부에서 추진하고 있는『서울기록원 건립공사』에 소요되는 조경관급자재 구매계획을 검토 보고 드림.

- 관련근거 : 서울기록원 제2018-221호(2018.08.09)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 서울기록원 건립공사

▢ 위    치 : 은평구 통일로684(녹번동)

▢ 규    모 : 지상5층, 지하2층, 연면적 15,004㎡

❍ 조경공사

- 수목식재

· 교  목 : 소나무 등 22종 207주

· 관  목 : 남천 등 16종 4,840주

· 초화류 : 감국 등 32종 15,790본

- 시설물 : 수생비오톱 등 33종

▢ 공사기간 : 2016.04.20. ～ 2018.10.17.

▢ 공 사 비 : 150억원(조경 724백만원)

Ⅱ		추 진 계 획

❍ 발주 및 계약 : ’18.08. 〜 ’18.08.

❍ 제작 및 설치 : ’18.08. 〜 ’18.11.

Ⅲ		구 매 내 용

▢ 품    목: 11종

▢ 금    액: 84,566천원

▢ 구매방법: 조달구매

▢ 관련규정: 조달사업에 관한 법률 제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

❍ 조달청장이 계약 체결한 수요물자(제3자 단가계약, 다수공급자계약)

▢ 구매내역                                     (단위:천원)

분야	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비고
	시멘트	40㎏	대	183	3,820	699,060
	레미콘	25-18-8,서울	㎥	74.168	65,510	4,858,745
	목재판재	T30, 캐리	㎡	233.290	108,000	25,195,320
조경	조경석A	2목	Ton	1.554	28,500	44,289
	조경석B	4목	Ton	3.345	29,190	97,640.55
	조경석C	6목	Ton	3.501	31,300	109,581.3
	자전거보관대	4000×1800×2250	개소	2	3,816,000	7,632,000
	자연석판석	T80 포천석, 버너마감, 모따기	㎡	648.23	68,300	44,274,109
	자연석판석	568×492×T30 포천석, 버너마감, 모따기	㎡	15.42	29,300	447,180
	자연석경계석	150×150×1000 포천석, 직선	㎡	44	11,710	515,240
	자연석경계석	150×150×1000 포천석, 곡선	㎡	11	21,660	238,260
	조달수수료	0.54%				454,195.15
	소 계					84,565,620

▢ 예산내역

❍ 소요예산 : 84,566천원

❍ 예산과목 : 정보관리강화, 기록물시설관리, 서울기록원건립시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		보고자 의견

❍ 서울기록원 건립공사(조경)진행공정에 차질이 없도록 적기에 관급자재 계약의뢰하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 서울기록원 조경관급자재 구매요청서 1부

2. 관급자재 검토서 1부.  끝.