문서번호	정수시설과-1815
결재일자	2018.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
홍승찬		임두선	08/14 임정규
협조
	주무관		代김태성

『태양광 발전시설 설치공사 실시설계 용역』

용역기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

구의아리수정수센터

정수시설과

용역기간 연기 검토 보고

우리 정수센터에서 시행 및 추진하고 있는『태양광 발전시설 설치공사 실시설계』용역과 관련하여 계약상대자로부터 용역기간 연기 요청이 있어 이에 대해 검토하고 처리방안을 보고합니다.

□  관련근거

○ 유정(구의아리수)1805-01(2018. 8. 13.)호

- 실정보고의 건(용역기간 연기 요청)

□  용역개요

○ 용 역 명 : 구의아리수정수센터 태양광 발전시설 설치공사 실시설계 용역

○ 용역업체 : ㈜유정이엔지(대표 : 유미경)

○ 용 역 비 : 금10,763,130원

○ 용역기간 : ‘18. 7. 13. ~ ’18. 8. 16.

○ 태양광 발전설비 **kW 사업 설계

사업내용

○ 사업규모: 태양광 발전설비 **kW(주차장A: **kW, 주차장B: **kW)

○ 사업기간: ‘18. 5월 ~ 11월

○ 사 업 비: *******천원(시설비: ***********원, 감리비: *********원)

○ 설치위치 및 현장사진

구 분	주차장 위치도	현장 사진
A
B

□  검토내용

○ 실정보고에 따른 용역기간 연장

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	‘18. 7. 13. ~ ‘18. 8. 16.	‘18. 7. 13. ~ ‘18. 9. 6.	21일 연장
계약금액	10,763,130원	10,763,130원	변경 없음

○ 연기사유

- 개발행위허가 신청 및 승인을 위한 사전절차 이행

- 실시설계 성과품 품질 향상

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□  검토결과

○ 상기와 같이 광진구 개발행위 허가 등 행정절차 이행 및 실시설계용역 성과품의 완성도를 높이고자

○ 계약상대자와 상호 합의하에 용역기간을 연장하고자 함.

붙 임 : 합의각서 1부.  끝.