문서번호	디자인정책과-8541
결재일자	2018.8.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공미술관리팀장	디자인정책과장
이승희		김태수	08/16 김선수
협조

- 공공미술작품 안전점검 용역 -

계 약 기 간  변 경 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2018. 8

문  화  본 부

(디자인정책과)

- 공공미술작품 안전점검 용역 -

계 약 기 간  변 경 계 획

설치가 오래된 도시갤러리 등 공공미술작품(6점)에 대한 안전점검을 실시 중으로 상태 분석 및 보수방안의 정확도를 위해 계약기간을 연장하여 미술작품 및 이용시민의 안전을 도모하고자 함

□ 추진근거

❍ 공공미술작품 안전점검 계획(디자인정책과-6577, ’18.6.26.) 및 계약체결(재무과-30577,2018.6.28.)호

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 공공미술작품 안전점검 용역

❍ 계약날짜 : 2018. 6. 27.

❍ 계약기간 : 2018.7.3. ~ 2018.8.16.

❍ 시 행 사 : ********

❍ 계약금액 : ********

❍ 과업내용

- 시설물 외관조사

- 재료 상태에 대한 전반적인 변화 조사

▸균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 부식, 접합부상태 조사 등

- 현장 재료시험, 비파괴 현장 시험

- 강도 시험, 계측기(균열게이지) 설치, 강재 접합부 검사 등

- 대상 공공미술작품 : 총 6개 작품

작 품 명 (설치연도)	작품 사진	규격	재료	소재지
스프링 (2006년)		높이 20m, 폭 5.6m	알루미늄 등	종로구 서린동 148
먼곳에서 오는바람 (2007년)		540*800* 1700(H)	스테인레스	성수동 1가 683-4 서울숲 내 바람의 언덕
하늘을 담은 그릇 (2009년)		460(H)*1350 (지름)	목재, 철재	마포구 상암동 481-72 난지하늘공원 억새광장
일어서자 초인상 (2009년)		420*245*306	철재, 석재, 합성수지	광진구 능동 18 어린이대공원 돔아트홀 앞
바람의 길 (2009년)		2500*1100 *1050	철재, 알루미늄, 스테인레스, 합성수지, 시멘트	영등포구 여의도동 84 마포대교 남단 마포대교 사거리
산 하늘문 (2010년)		940*890*420(H)	스테인레스, 석재	마포구 상암동 481-72 하늘공원 상부

□ 계약변경내용

❍ 용역 계약기간 연장(금액변경 없음)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	2018.7.3.∼2018.8.16.	2018.7.3.∼2018.8.31.	16일 연장
계약금액	********	********

❍ 연기사유

- 공공미술작품인 동시에 시설물 ‘바람의 길’ 등 6개 작품 안전점검과 관련 점검시 시기와 계절적인 문제로 점검이 원활히 진행되지 않아 좀더 정확한 자료를 얻기 위하여 계약기간을 연장 하고자 함

- 또한, 현장방문 시 하계휴가기간 등 해당작품 위치의 현장업무자와 협의가 계획대로 진행되지 않아 계측기 설치 등 안전점검 자료 확보를 위한 기기 설치 기간이 소요됨

❍ 연기사유 귀책소재 : 서울시와 용역수행자 합의에 의함

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 행정사항

❍ ′18.8.16. : 계약기간 연장 의뢰

❍ ′18.8.31. : 정산 및 보고서 제출

따로 붙임 : 합의각서 1부(별도첨부).  끝.