투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 물량 변경 요청 (시립노원청소년직업체험센터 신축공사)

1. 신한시노청 제2018-114(2018.08.07)호 관련입니다.

2.『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』관급자재 물량변경을 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 내역

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	규 격	단가(원)	단위	수 량
					당초	변경	증·감
00156194702 (12-17-1-85552-00)	시멘트	분공장도	*******	*	****	****	****
12161058802 (12-17-1-85696-00)	레미콘	25-24-15	*******	**	****	****	****
	레미콘	25-18-12	*******	**	***	***	***
	레미콘	25-18-8	*******	**	***	***	*
	레미콘	25-21-12	*******	**	**	*	**
00176017101 (12-17-1-85730-00)	이형봉강	SD400 HD-10	********	*	***	******	*******
	이형봉강	SD400 HD-13	********	*	**	******	*******
	이형봉강	SD400 HD-16	********	*	**	******	*******
	이형봉강	SD500 SH-19	********	*	***	******	*******
	이형봉강	SD500 SH-22	********	*	****	********	******
00178080901 (12-17-1-85560-00)	흡음용천장재	T15mm	*******	*	****	****	****

나. 변경 사유: 설계변경 및 실투입(예정) 물량 반영 등

붙임 : 1) 관급자재 매입요구서 1부

2) 관급자재 수량변경검토 실정보고(건설사업관리단) 1부.

3) 분할납품요구 및 통지 각 1부.  끝.

	건축부장
주무관	남광연		건축관리과장	代송옥의		건축부장	08/17 임인구
협조자
시행	건축부-11670	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)