투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	공사기간 변경 시행(2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사- 숙대입구역, 이대역)

우리 사업소에서 시행 중인 “2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(숙대입구역, 이대역)”의 선행공사인 토목공사 지연에 따라 공사기간 변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

나. 도 급 자 : ********************

다. 최초 계약일 : 2018. 3. 22.

라. 변경 계약일 : 2018. 5. 21.

마. 공사기간 변경내용

공사 기간		변경 사유	비 고
당 초	변 경
2018. 3. 26.～2018. 8. 24.	2018. 3. 26.～2018. 11. 24.	선행공사인 토목공사 지연에 따른 절대공기 부족	기타사항 “변경없음”

마. 공사금액 : 17,146,800원

바. 귀책사유 : 서울특별시(서부도로사업소)

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김성균		기전과장	전결 08/17 代윤석주
협조자
시행	기전과-7586	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(7)