문서번호	시설과-1865
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
최현주	이용원	문인기		08/17 오진완
협 조

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청 검토보고

2018. 8.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『금천 박미사랑공원 조성공사』의 감독기관인 서울시설공단의 공사 진행 중 실정 사항 승인요청에 대하여 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 금천 박미사랑공원 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 7. 2. ~ 10. 29.

○ 사업내용 : 토공, 우상수공, 포장공, 정자 등 시설물 17종 설치, 수목 식재 등 공원조성

○ 도 급 액 : 금438,956,900원(관급자재비 별도)

○ 도 급 자(주계약자 공동도급방식)

- 주계약자 : 큰빛종합건설(주) 대표 김현철

- 부계약자 : 세인조경(주) 대표 이현룡

○ 감 독 청 : 서울시설공단 공사감독 3처

Ⅱ		실정보고 검토내용

○ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독3처-8026호(2018.8.16.)

○ 실정 보고사항 : 현장 지반 저부에 적치된 폐기물 발생

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비 고
폐기물 운반 및 처리	▸ 토공작업 중 지반 저부에 적치된 폐기물 발생	▸폐기물 처리하고 내역서 반영 - 폐기물 상차 0 → 40㎥ - 폐기물 운반 0 → 40㎥ - 폐기물 처리(혼합 40*1.36) 0 → 54.4ton ≒ 50톤 적용

Ⅲ		변경금액(개략공사비)

구 분		금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		572,140	577,192	5,052
도급비	공급가액	399,052	403,645	4,593
	부 가 세	39,905	40,364	459
	계	438,957	444,009	5,052
관급자재비		130,210	130,210	0
상수도인입비		2,973	2,973	0

※ 세부내역 : 따로붙임.

Ⅳ		검 토 의 견

○ 서울시설공단 실정보고 사항에 대하여 상기와 같이 승인 처리하여 우선 시행하고, 증가되는 예산은 본 사업의 낙찰차액 등을 활용하여 향후 준공 전 설계변경 시행코자 함.

붙 임 : 1. 관련공문 1식.

2. 폐기물 사진 1부.  끝.