문서번호	기전과-7089
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
정경성		송장현	08/17 김용제
협조
	주무관		장기윤

어린이보호구역 노란신호등 설치 사업 계획 보고

(시민참여예산사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

강서도로사업소

(기전과)

어린이보호구역 노란신호등 설치 사업 계획 보고

어린이보호구역 신호등을 노란색으로 설치하여 보호구역 내

어린이 교통사고를 예방키 위해 시행하는 사업 계획 보고임

□ 관련근거

○ 어린이보호구역 노란신호등 설치사업 예산 재배정 통보【교통운영과-1557(2018. 1.26.)】

○ 어린이보호구역 노란신호등 설치 관련 업무 협조 요청【교통운영과-2311(2018. 2. 7.)】

○ 어린이보호구역 노란신호등 설치 관련 회신【교통관리과-3510(2018. 2. 9.)】

□ 사업 개요

○ 사업명: 어린이보호구역 노란신호등 설치사업(시민참여)

○ 총사업비: 200백만원(시설비)

※ 강서도로사업소 재배정액: 50백만원

○ 예산과목: 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통                   소통 및 안전관리강화, 교통사업특별회계, 어린이보호구역                    노란신호등 설치 및 유색포장정비(시민참여)

○ 공사기간: 2018. 2. ~ 12.

□ 그간 추진사항

○ 사업대상지 취합: 2018. 2.

○ 사업대상지 전수조사: 2018. 3. ~ 6.

○ 사업대상지 선정(최종): 2018. 7.

□ 향후 추진 일정

○ 자재 구매(조달청 3자단가): 2018. 9. 7.까지

○ 교체 작업: 2018.10.31.까지

□ 사업대상지 전수조사 결과

전수조사
구별	전수조사 개소	교체 대상(조, 대)					노후지주(본)
		4색등	3색등	경보등	보행등	잔여표시기	차량	보행
강 서	11	1	47	0	48	30	5	3
영등포	10	0	32	0	56	40	0	0
구 로	10	11	28	0	44	34	2	1
양 천	11	5	27	10	40	28	4	1
계	42	17	134	10	188	132	11	5

□ 사업대상지 선정 결과

사업대상
구별	사업 대상지	교체 대상(조, 대)					노후지주(본)
		4색등	3색등	경보등	보행등	잔여표시기	차량	보행
강 서	3	1	12	0	16	12	2	2
영등포	3	0	12	0	26	22	0	0
구 로	3	6	8	0	22	18	2	1
양 천	3	4	9	0	16	16	4	1
계	12	11	41	0	80	68	8	4

○ 강서구(3): 신월초교, 월정초교1·2

○ 영등포구(3): 당산초교, 선유초교, 영문초교

○ 구로구(3): 덕의초교, 구로초교, 천왕초교

○ 양천구(3): 신은초교, 계남초교, 목원초교

□ 사업대상지 선정 방법

○ 자치구별 3개 교차로씩을 사업대상지로 최종 선정

- 규제 건 연계사업 가능 교차로

- 잔여시간표시기가 설치되어 있는 교차로

- 노후지주(흑관)가 포함된 교차로

- 기존 설치 수량이 많아 사업효과가 상대적으로 큰 교차로

□ 보고자 의견

○ 노후지주(흑관) 교체가 필요한 교차로는 설계업체에 설계지시 후

성과품 납품되면 작업지시하고

○ 교통신호등 자재는 관급자재(3자단가품목)로 조달구매하여 지급코자 함.

※ 관급자재비: 40,718천원 상당

○ 교체 후 발생되는 자재는 신설 및 보수공사에 우선 사용하고, 잔여

물량은 보수용 자재로 전환하여 사용 예정임.

○ 교체에 필요한 노무비는 소액이므로 교통신호기 신설 및 보수공사

(연간단가)에 포함하여 사업 진행하고, 추후 설계변경 정산코자 함.

붙임  1. 어린이보호구역 노란신호등 설치 사업 대상지 현황 1부

2. 어린이보호구역 노란신호등 설치 사업 대상지 현장조사표 1부

3. 물품매입요구서 1부.

4. 노후지주 교체 대상 현장사진 및 위치도 3부.

5. 공문서 3부.

6. 참고자료 1부. 끝.