문서번호	건축부-11643
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		박범규	08/17 임인구
협 조
	주무관			이수호
	주무관			장진우
	주무관			김완선

서울애니메이션센터 건립공사 건설사업관리용역  사업수행능력(PQ) 접수결과 및 평가계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

서울애니메이션센터 건립공사 건설사업관리용역

사업수행능력(PQ) 접수결과 및 평가계획 보고

서울애니메이션센터 건립공사 건설사업관리용역의 입찰참가 적격자를 선정위해

수행실적평가(PQ)의 접수결과 및 평가계획 보고 드림

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 서울애니메이션센터 건립공사 건설사업관리용역(감독권한 대행)

용역개요

- 용역기간 : 착수일로부터 46개월

- 용역금액 : 3,903,580천원(1차 용역금액 : 333,000천원)

- 용역내용 : 설계VE 등 실시설계단계 건설사업관리/ 철거공사단계/구매

조달단계 건설사업관리/ 건축, 구조, 안전, 토목, 조경, 기계,

전기, 정보·통신, 소방 등

시공단계 건설사업관리(감독권한대행)

- 공사규모

· 연면적 15,900㎡/ 지하4층, 지상3층, 신축

Ⅱ		추진경위

2018. 7.10    건설사업관리용역 시행계획 방침

2018. 8. 2    건설사업관리용역 입찰공고

2018. 8. 2 ~ 8. 3  설계도서 열람

2018. 8. 9    사업수행능력평가 기준 질의 접수(9개 업체)

2018. 8.16    수행능력평가서 접수(12개 업체)

Ⅲ		계약방법

계약방법 : 일반입찰【사업수행능력평가(PQ+SOQ) 후 가격입찰】

사업수행능력평가(PQ+SOQ)				입 찰
수행실적평가(PQ)		기술자평가(SOQ)		낙찰자 결정
PQ점수 90점이상 등 ⇒ 기술자평가 자격부여		SOQ점수 85점이상 등 ⇒ 입찰참가 자격부여		최저가 입찰자부터 심사한 결과 종합평점 85점 이상인 업체 낙찰

Ⅳ		수행실적평가(PQ) 접수결과

접수기간 : 2018. 8.16 (목) 10:00 ~ 17:00

접수업체 : 12개 업체(붙임 참조)

참여업체	대표업체 소재지		비 고
	서 울 시	지 방 (경기2,경북1,충북1,제주1,인천1)
*******	******	******

Ⅴ		수행실적 평가계획

평가기간 : 2018. 8. 17. ~ 8. 22.

평가기준 : 서울애니메이션센터건립공사 건설사업관리용역

사업수행평가기준

평 가 자 : 건축총괄과 총 4명

평가방법 : 평가대상별 평가점수 복수 검증

구 분		평가대상				비 고
		A조		B조
		1~3번	3~6번	7~9번	10~12
평가자	총괄	환경시설과장				복수검증
	검토자	***	***	***	***
		***	***	***	****

Ⅵ		향 후 계 획

2018. 8. 17   참여업체 명단 서울시 홈페이지에 공개

2018. 8. 17 ~ 8. 21  부실기술자 등록여부 조회(기술심사담당관)

2018. 8. 22   수행실적평가(PQ) 결과 보고 및 개별 통지

2018. 8. 23 ~ 8. 24 : 평가결과에 대한 이의신청 접수

2018. 9.  3    기술자평가서(SOQ) 접수

2018. 9. 10   기술자평가서(SOQ) 평가 및 면접

2018. 9. 13   기술자평가 결과 공개

2018. 9. 13   평가결과에 대한 이의신청 접수

2018. 9. 17 ~ 9. 19 : 가격입찰

2018. 9. 19   적격심사 후 낙찰자 결정

붙임 : 1. ****************

2. ****************

3. 참여업체 명단-공개용 1부.

4. ************(별첨).  끝.