문서번호	시설과-3742
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장
김소연	이무림	08/20 김재균
협 조

남산공원 진입로 경관 개선공사

준공기한 연기 검토 보고

2018. 8.

중부공원녹지사업소

(시설과)

- 남산공원 진입로 경관 개선공사 -

준공기한 연기 검토 보고

「남산공원 진입로 경관 개선공사」 준공기한 연기를 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

□ 위    치 : 남산공원(중구 소공로3길 29-8일대)

□ 공사내용 : 목재데크 및 난간 정비, 배수로 정비, 수목식재 등

□ 공사기간 : 2018. 6. 18 ~ 8. 30

□ 총공사비 : 금201,561,150원

▸ 도 급 비 119,312,000원, 관급자재비 82,249,150원

□ 도급업체 : ㈜청미건설 대표 양국진

2		준공기한 연기

□ 준공기한

▸ 당초 : 2018. 6. 18 ~ 8. 30

▸ 변경 : 2018. 6. 18 ~ 10. 15

※ 관급자재 : 도급공사 준공기한에 맞춰 납품기한 연장(8.20 → 10. 15)

□ 연기사유

▸ 여름철 유래없는 지속된 폭염으로 현장 근로자 안전을 위한 작업 중지 및 민원 협의 등에 따라 부득이 준공기한 연기

□ 지체상금 부과여부 검토

▸ 연기사유 귀책소재가 서울시에 있으므로 지체상금 미부과

3		보고자 의견

□ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.  끝.