투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	조달물품 납품기한 연기요청(관급자재 조달구매-남산공원 진입로 경관개선공사)

1. 공원운영과-8151(2018.5.30.)호와 관련입니다.

2. 위호로 계약 체결한 조달물품에 대하여 다음과 같이 납품기간을 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 조달구매 – 남산공원 진입로 경관개선공사

나. 납품기한 연기내역

(단위 : 원)

업체명	품명	납품기한		수량	물품대	수수료	합 계
		당초	변경
*******	금속제울타리	2018.8.20	2018.10.15	109	36,842,000	188,990	37,030,990
한국가로수보호(주)	맨홀뚜껑	2018.8.20	2018.10.15	35	17,885,000	91,750	17,976,750
오성씨앤디	안내판	2018.8.20	2018.10.15	3	5,184,000	26,590	5,210,590

다. 연기사유 : 공기연장으로 인해 공사일정에 맞게 상기 자재 납품기한 연기.  끝.

	시설과장
주무관	김소연		조경팀장	이무림		시설과장	08/20 김재균
협조자
시행	시설과-3750	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/	chau420@seoul.go.kr	/	부분공개(7)