투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(남산공원 진입로 경관개선공사)

시설과-3742(2018.8.20)호와 관련하여「남산공원 진입로 경관개선공사」준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 남산공원 진입로 경관개선공사

2. 공사기간 : 2018. 6. 18. ~ 8. 30.

3. 도 급 비 : 금119,312,000원

4. 도 급 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

5. 준공기한

가. 당  초 : 2018. 6. 18. ~ 8. 30.

나. 변  경 : 2018. 6. 18. ~ 10. 15.

다. 연기사유 : 여름철 폭염으로 현장 근로자 안전 위한 작업 중지 및 민원 협의 등에 따른 절대공기 부족

6. 지체상환금 부과 여부 : 미부과

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김소연		조경팀장	이무림		시설과장	08/20 김재균
협조자
시행	시설과-3752	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/	chau420@seoul.go.kr	/	부분공개(6)