투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(남산 및 산하공원 공원시설 정비공사)

시설과-3743(2018.8.20.)호와 관련하여「남산 및 산하공원 공원시설 정비공사」준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 남산 및 산하공원 공원시설 정비공사

2. 공사기간 : 2018. 6. 18. ~ 8. 30.

3. 도 급 비 : 금132,879,800원

4. 도 급 자 : 에스트건설㈜ 대표 김수관

5. 준공기한

가. 당  초 : 2018. 6. 18. ~ 8. 30.

나. 변  경 : 2018. 6. 18. ~ 9. 20.

다. 연기사유 : 여름철 폭염으로 현장 근로자 안전 위한 작업 중지 등에 따른 절대공기 부족

6. 지체상환금 부과 여부 : 미부과

붙임  준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김소연		조경팀장	이무림		시설과장	08/20 김재균
협조자
시행	시설과-3753	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/	chau420@seoul.go.kr	/	부분공개(6)