문서번호	도시철도설비부-7869
결재일자	2018.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	08/20 代서태창

9호선 3단계 영업시운전 결과 보고

[8.19.(일)]

2018. 8.20.

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 3단계 영업시운전 일일 결과 보고

국토교통부(철도시설안전과-2199호,´18. 8. 7.), 한국교통안전공단

(철도기술처-1194호,´18. 6.26) 및 철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선

3단계 영업시운전을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

▢ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제14조

▢ 시험기간 : ´18. 8.11. ~ ´18.10. 1(52일간, 휴일 없음)

▢ 운전시간 : 09:00 ~ 18:00

▢ 시험차량 : - 평 일 : 4량 2편성, 6량 2편성(3회 왕복)

- 토·일 : 4량 2편성,  6량 1편성(3회 왕복)

▢ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주)]

▢ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[영업시운전 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

▢ 영업시운전 내용

계	운 전	영 업	비 고
31	11	20

▢ 추진일정

영업시운전		시험결과 검토		시정(개선)명령통보
´18.8.11~10. 1	⇨	´18.10.1~10. 5	⇨	´18.10. 8	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전(개통)
´18.10.10	⇨	´18.10.12	⇨	´18.10월말
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시 험 결 과

▢ 시운전시간 [2018. 8.19. 일]

1단계 관제센터 통제		시운전 시간
급 전	단 전
09 : 58	17 : 33	10 : 55 ∼ 17 : 28

▢ 터널내 안전점검

○ 이상없음(해당공구 책임감리원, 현장대리인)

▢ 시험내용

○ 931~938역 영업시운전(9일차)

↳ 종합시험(신호)

- 4량, 6량 열차 정위치 정차 시험

↳ 승강장 안전문(설비)

- 개폐 점검

○ 역사 등 지상 시험 및 관제시험 없음.

▢ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
				없 음

▢ 시운전 전동차

○ 시험열차: 3편성(본선 기관사 4명, 견습 기관사 2명)

- 1단계 운영사 : 2편성(4량 열차)

- 2단계 운영사 : 1편성(6량 열차)

▢ 영업시운전 장애(보완)사항 조치현황

정거장	분 야	장애(보완)사항	조치사항	비 고
931		-
932		-
933	PSD	4량 열차 정차시 6량 PSD 열림	‘18.8.20 조치예정
934		-
935		-
936		-
937		-
938	건축 (통신)	승강장 축소구간 출입문 1개소 열림	‘18.8.20 시건 조치완료

▢ 명일 계획

○ 시운전시간 : 2018. 8.20.(월) 09시 ~ 16시(주간)

○ 시운전 열차 : 4량 2편성, 6량 2편성

○ 시운전내용

- 차 상

↳ OP-01(승무) 운전자시간, 정차 위치 점검

- 지 상

↳ CO-04(통신) 자동방송장치의 방송점검

↳ CO-08(설비) 기타영업서비스 점검(역사 환기, 냉난방 등 점검)

※ 특이사항

- 일 시 : 2018. 8.21(화) 새벽 01시~04시

- 사전회의 : 2018. 8.20(월) 21시 관제센터에서 관계자 사전회의 실시

- 내 용 : 929(봉은사역) ~ 931변전소간 연장급전시험

- 열 차 : 4량 2편성, 6량 2편성.

- 시험자

↳ 본부(송변전 담당자), 시스템분야 책임감리원, 1~2단계 운영사,

시운전상황실.

- 작업통제 : 2018. 8.20(월) 시운전 종료후(단전) ~ 8.21(화) 05시까지

모든 작업(이동통신사 포함) 금지.  끝.