위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(알뜰BIT 설치사업 전기공사)

1. 교통정보과-12100(2018.08.16.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인“ 알뜰BIT(버스정보안내단말기)설치사업 전기공사”에 대한 준공기한 연기를 다음과 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 2018년 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업전기공사

나. 계약업체 : 보훈종합건설(주) 대표 송계점

다. 계약금액 : 428,965,990원

라. 계약일자 : 2018.4.11

마. 변경계약 요청내용 : 공사 준공기한 연기

***	***	***	***
****	*****************	******************	****
****	************	************	****

바. 연장사유 : 폭염 및 알뜰BIT 현장조사 물량증가

따로붙임: 1) 준공기한 연기방침서 1부.

2) 준공기한 연기신청 검토의견서 1부.

3) 합의각서 1부.

4) 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	교통정보과장
주무관	김상곤		버스정보팀장	조대근		교통정보과장	08/20 이수진
협조자	주무관	이철주
시행	교통정보과-12251	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28(종로소방서 5층)	/	http://topis.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4963	/전송	02-2133-4990	/	sgkim1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)