투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사)

1. 기반시설과-2352(2018. 8. 20.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인「2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사」준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

1) 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사

2) 계약기간 : 2018. 4. 6. ~ 2018. 8. 30.

3) 도 급 액 : 금339,867,000원

4) 도 급 자 : 물춤워터아트㈜(대표: 신건수)

나. 준공기한 연기

계약일	착수일	준공기한
		당초	변경
‘18. 4. 6.	‘18. 4. 9.	‘18. 8. 30.	‘18. 9. 21.

다. 귀책소재 : 한강사업본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 한강공원 야외수영장 및 물놀이장 운영기간 중 시설물 파손에 대한 응급복구(계약금액 변동없음)

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	박지수		기반시설과장	08/20 代신용철
협조자
시행	기반시설과-2353	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개