문서번호	소방행정과-8147
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김종돈	최강의	김종린	08/20 김두일
협 조

-2019년도 마곡119안전센터 신축공사- 마곡119안전센터 사업비 소요예산 검토보고

2018. 08.

강서소방서 소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호		□	의사결정 또는 내부검토 과정

-2019년도 마곡119안전센터 신축공사- 마곡 사업비 소요예산 검토보고

강서소방서 마곡119안전센터 신축공사와 관련하여 2019년도 시설비   등 소요예산 검토결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

□ 市 소방행정과-32930(2018.12.26.)호『2018년도 소방안전       특별회계 예산편성 결과 알림』

□ 소방행정과-3446(2017.3.17.)호『강서소방서 마곡119안전

센터 신설계획』

Ⅱ		일반현황

□ 사 업 명: 강서소방서 마곡119안전센터 신설

□ 위    치: 서울 강서구 마곡동 마곡지구(공공용지 F11)

□ 사업기간: 2018. 01 ~ 2019. 10.

□ 규    모: 3층 연면적 880㎡, 대지면적 1,063㎡

1. 연면적 증가: 35㎡(변경전 845㎡ ⇒ 변경후 880㎡)

☞ 연면적 증가 사유: 신축을 위한 건축설계시 부대시설 면적 증가

2. 연면적 증가에 따른 공사비(시설비) 증액

☞ 본부 조직경영팀과 사전협의 추진 중

Ⅲ		사업비 소요예산 검토

□ 사업비 검토 현황

○2019년 소요예산: 금2,259,010천원

○2018년 기준대비: 금296,602천원 증가(5.1%)

□ 사업비 소요예산 검토내역(건축비 등 직선보간법 산정)

○ 공사면적: 연면적 880㎡(금2,018,720천원)

○ 지반강화 말뚝기초공사: 75개소(금105,000천원)

○ 건축 감리비 요율조정: 공사비의 1.15%(금23,215천원)

○ 시설부대비 요율조정: 공사비의 0.40%(금8,074천원)

구분	변경 전			⇒	변경 후			증감
	계	2018	2019		계	2018	2019
계	5,518	3,556	1,962		5,815	3,556	2,259	296
사무 관리비	34		34		31		31	△3
시설비	5,385	3,556	1,829		5,490	3,556	2,123	294
감리비	26		26		23		23	△3
시설 부대비	7		7		8		8	1
자산 취득비	65		65		73		73	8

(단위: 백만원)

□ 공사비 증액 산출내역

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
사무관리비			○	사무용품 등 구매 31,000,000원 = 31,000천원
	증감사유
	ʼ19년 청사 준공에 따른 사무관리비 반영
시설비	○	토지매입비 3,445,183,000원 = 3,445,183천원	○	공사비 2,018,720,000원 = 2,018,720천원
	○	설계비 및 설계공모비 110,925,000원 = 110,925천원	○	지반공사 파일시공 공사비 105,000,000원 = 105,000천원
	증감사유
	신축공사에 따른 공사비 반영으로 증액 연약 지반공사 파일시공 공사비 반영으로 증액
감리비			○	감리비 23,215,280원 = 23,216천원
	증감사유
	신축공사에 따른 감리비 반영으로 증액
시설부대비			○	시설부대비 8,075,000원 = 8,075천원
	증감사유
	신축공사에 따른 시설부대비 반영으로 증액
자산및물품취득비			○	청사 집기류 등 구매 73,000,000원 = 73,000천원
	증감사유
	ʼ19년 청사 준공에 따른 자산취득비 반영

붙임 1. 마곡119안전센터 사업설명서 1부.

2. 마곡119안전센터 사업설명서 보조자료 1부.  끝.