문서번호	방재시설부-10752
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	08/20 代진재섭
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

흙막이 버팀공법 변경 등 자문회의 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

흙막이 버팀공법 변경 등 자문회의 개최 계획

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 총인처리시설 및 유입펌프장 가시설 버팀공법 변경 및 복공 설치에 따른 외부전문가 자문회의를 개최코자 함. ※ 근거 : 중랑 감 제18-211호, -212호(2018. 8.20.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017. 9.13. ~ 2019.11.12.

1차  2017. 9.13. ~ 2018.12.10.

○ 계약금액 : 총괄 16,339백만원(1차 13,336백만원)

○ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2013. 5.28 : 물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침 제183호)

○ 2015. 2.25 : 4개물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 시행계획

○ 2017. 2.27 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2017. 9.13 : 공사계약 및 착공 후 공사중지

○ 2017.10.20 : 공사재개

○ 2018. 2.12 : 유해위험방지계획 부적정으로 인한 공사중지(노동부)

○ 2018. 3.22 : 유해위험방지계획 조건부 승인, 공사중지 해제(노동부)

○ 2018. 6.30 : 총인처리시설 Sheet Pile 및 H-Pile 설치 완료

○ 2018. 7.27 : 유입펌프장 Sheet Pile 및 H-Pile 설치 완료

Ⅲ		자문회의 개요

○ 일  시 : 2018. 8. 24(금) 10:30 ~

○ 장  소 : 도시기반시설본부 대회의실(11층)

○ 참석자 : 5명

- 외 부 : 이채규(한국구조물안전연구원 대표이사), 안삼현(진우엔지니어링 부사장), 이규웅(대웅컨설턴트 대표이사)

- 내 부 : 방재시설부장, 환경시설과장 등

○ 준비내용 : 자문회의 보고자료 준비 등

Ⅳ		자 문 내 용

○ 흙막이 가시설 버팀공법 변경 및 복공 설치 등 적정성 검토

○ 흙막이 가시설 버팀공법 변경 및 복공 설치 등 안전성 검토 등

Ⅴ		행 정 사 항

○ 외부위원 사전 검토자료 제공 및 설명 : 건설사업관리단

○ 자문위원 수당 지급

- 외부전문가 자문수당 : 450,000원 (시공 中 제안으로 시공사 지급)

․150,000원 × 3명 = 450,000원

Ⅵ		향 후 계 획

○ 2018. 8 : 자문회의 검토의견 반영 후 결과보고(건설사업관리단)

○ 2018. 8 : 실정보고 승인 검토

붙임  검토의견서(양식) 1부. 끝.