문서번호	하천관리과-11832
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청계천관리팀장	하천관리과장
조현범		민형일	08/20 손경철
협조

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

착수 보고회 개최 결과보고

2018.  8.

하 천 관 리 과

(청계천관리팀)

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

착수 보고회 개최 결과보고

『사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역』의 설계 수준 향상 및 내실 있는 용역 수행을 위해 착수보고회를 개최하고 결과를 보고함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역

○ 위    치 : 사당천(이수역~방배펌프장) L=0.75km

○ 용역기간 : 2018.5.14. ~ 2018.11.09.(180일)

○ 용 역 비 : 357,438천원

○ 용 역 사 : ㈜화신엔지니어링 외 2개사(동해종합기술공사, 성진기술단)

○ 과업내용 : 사당천 통수능 확대를 위한 암거 신설 기본 및 실시설계

Ⅱ		착수보고회 개요

○ 일  시 : 2018. 8. 17(금) 10:30~11:30

○ 장  소 : 물순환안전국장실

○ 참석자 : 총 8명

- 내부 : 물순환안전국장, 하천관리과장, 청계천관리팀장, 담당 2명

- 외부 : 용역사 책임기술자 등 3명

Ⅲ		보고 내용

○ 과업의 개요, 범위, 과업 수행일정, 추진계획

○ 단면확장 우선 시행구간 설계 검토 내용

○ 암거신설에 따른 효과 및 향후일정 등

Ⅳ		주요의견

○ 접합부 설계시 누수가 되지 않도록 면밀한 검토 필요

○ 신설 암거 설치 구간중 지반고가 낮은 구간은 면밀한 검토 필요

○ 사방교 교각부와 복개구간 분리벽 연결 불일치 구간 확인 필요

○ 사업이 지연되지 않도록 기술심사담당관 등과 사전절차 협의 철저

Ⅴ		향후계획

○ ’18.8 ~ ’18.9  : 우선 시공구간 설계완료 및 사전절차 이행

○ ’18.9 ~ ’18.10 : 우선 시공구간 공사발주

○ ’18.11           : 나머지구간 설계 완료 및 용역 준공

붙 임 : 착수보고 자료 1부.  끝.