문서번호	정수과-4966
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		김효상	08/20 김중영
협 조
	주무관			석은숙
	주무관			양은영
	주무관			정갑평

운반시간 감소에 따른 사업장폐기물처리용역 변경계약 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.  .

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

운반시간 감소에 따른

사업장폐기물 처리용역 변경계약 계획

2018년도 사업장폐기물(무기정 정수오니)처리용역과 관련 운반시간 감소에 따른 변경계약을 추진하여 배출수처리설 운영에 지장이 없도록 하고자 함.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 뚝도아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역 단가계약

○ 용역기간 : 2018. 6. 16. ~ 2020. 5. 31.

○ 계 약 자 :

구 분	상 호	대표자	주 소
처리자	****	***	*********************
	*****	***	*************************
	******	***	******************
운반자	*******	***	*************************

○ 계약금액 : ***************

구 분	합계	2018년 (6.16.~12.31)	2019년 (1.1.~12.31)	2020년 (1.1.~5.31.)	비고
금 액(원)	*************	***********	***********	***********
처리물량 (톤)	******	*****	******	*****

※ 처리단가 : 처리비 - *********, 운반비 – *********

□ 변경계약 내역

○ 관련 근거 : 사업장폐기물처리용역 계약특수조건 제20조 4항

- 계약상대자의 정수오니 운반거리 또는 운반시간이 정수센터가 운반비 산출시 기준으로 사용한 운반거리 또는 운반시간 보다 감소되는 경우, 정수센터는 감소된 거리 또는 시간으로 운반비를 재 산출한 후 낙찰율을 곱한 금액으로 계약금액을 조정할 수 있다.

○ 변경 사유 : 운반시간 감소에 따른 운반비 감액 및 계약금액 변경

- 당초(설계) : *********

- 변경(낙찰) : ***********************************

○ 운반비 변경 내역

구 분	당초(계약)	변경(낙찰)	변경내역	비 고
운반시간(분)	*****	*****	*******
운반단가(원/톤)	******	******	*******	낙찰율 81.852% 적용
처리단가(원/톤)	******	**	****
계약단가(원/톤)	******	******	*******

※ 운반비는 분담비율이 34%, 33%, 33%로 유사하므로, 업체별 운반단가의 평균단가(총운반비/총물량)으로 청구.

○ 계약금액 변경 내역

구 분		당 초(원)	변 경(원)	증, 감	비 고
총계약부기금액(원)		*************	*************	**************
차수별	1차(2018)	***********	***********	************
	2차(2019)	***********	***********	*************
	3차(2020)	***********	***********	*************

□ 향후 일정

○ 2018. 8. 21 : 변경계약 의뢰 (행정관리과)

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 운반비 산출내역서 1부. 끝.