과 장		08/21 유태용	심사자	정회곤		설계자	박성근		설 계	심 사		결 재
									2018년08월17일	2018년08월21일
설 계 변 경 서(제2회)
	공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 969,796,550원			금 969,796,550원			-
	도급비	공 급 가 액			금 596,700,000원			금 647,940,000원			증) 51,240,000원
		부 가 가 치 세			금 59,670,000원			금 64,794,000원			증) 5,124,000원
		계			금 656,370,000원			금 712,734,000원			증) 56,364,000원
	관 급 비				금 230,111,000원			금 256,576,000원			증) 26,465,000원
	이설비 및 기타				금 83,315,550원			금 486,550원			감) 82,829,000원
공사개요 - 당 초 : 차선도색 L=252,000m, 차선제거 L=26,400m, 도로표지병 설치 N=380개, 도로표지병 제거 N=200개 - 변 경 : 차선도색 L=287,000m, 차선제거 L=19,000m, 도로표지병 설치 N=380개, 도로표지병 제거 N=200개