문서번호	설비부-11575
결재일자	2018.8.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		김은덕	08/22 권오식
협조

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

2018. 08.

도 시 기 반 시 설 본 부

(설  비  부)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

하절기 폭염으로 인한 공사지연으로 선행공정(토목) 공사기간이 연장됨에 따라 본 공사의 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□  위    치 : 동작대로 방배경찰서 ~ 서울시계

□  공사내용 : 가로등이설 19본, 신호등주 설치 14본, 신호제어기 4면

□  공사기간 : 2017.12.11.~2018.08.31.

□  계약금액 : 금777,552,590원

□  감리/시공사 : ㈜동성엔지니어링/(주)삼영기업

2		검토근거

○ 감리사(주.동성엔지니어링) 공문 2018-135호(2018.08.21.)관련, 공사기간 연장요청 검토

3		검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 선행공정(토목)이 폭염으로 인한 공사지연으로 인한 공사기간 변경

→ 후속 공종인 전기공사도 기간 변경

○ 준공기한 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2017. 12. 11. ~ 2018. 08. 31.	2017. 12. 11. ~ 2018. 09. 30.	증) 30일

○ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 감리 검토의견

- 관련법령 등을 검토한 결과 선행공종인 토목공사 공사기간 연장에 따라 후속공종인 전기공사 기간을 연장함이 타당하다고 판단.

4		조치계획

○ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 예정공정에 맞춰 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.