문서번호	정수과-7260
결재일자	2018.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
안영환		하은경	08/23 가길현
협조
	주무관		변민용

배출수처리시설 운영관리 용역 변경계약 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

정수과

배출수처리시설 운영관리 용역 변경계약 추진계획

공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환과 관련하여 「배출수처리시설 운영관리 용역」의 계약기간 연장 사유가 발생됨에 따라 계약기간 및 금액에 대해 변경계약을 추진함

□ 관련 근거

○ 공공부문 비정규직 전환에 따른 용역계약 연장 및 고용승계 요청

(노동정책담당관-12878, 2017. 12. 7.)

○ “배출수시설 관리 용역” 정규직 전환 관련 계약연장 관련 지침 통보

(생산관리과-7439, 2018. 7. 12.)

□ 용역계약 현황

○ 건    명 : 암사 배출수처리시설 운영관리 용역(장기계속)

○ 계약업체 : 태일환경관리(주)

○ 계약기간 : 2015. 9. 1 - 2018. 8. 31(3년)

○ 총 용역 부기금액 : ￦1,248,599,000원(금차￦371,085,000원)

□ 변경계약 내역

○ 계약기간 변경 : 3개월 연장

- 당초 : 2015. 9. 1 ~ 2018.  8. 31(3년)

- 변경 : 2015. 9. 1 ~ 2018. 11. 30(3년 3월)

○ 계약금액 변경내역                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역부기금액		1,248,599,000	1,387,727,000	증139,128,000
차수별	1차년도 (`15.9.01-12.31)	101,629,000	101,629,000	기정산
	2차년도 (`16.1.01-12.31)	304,546,000	304,546,000	기정산
	3차년도 (`17.1.01-12.31)	479,644,000	479,644,000	기정산
	4차년도 (`18.1.01-11.30)	371,085,000	510,213,000	증139,128,000

□ 향후 일정

○ 2018. 8. 24 : 변경계약 의뢰 (행정관리과)

○ 2018. 9. ~  : 신규계약 발주 또는 용역근로자 공무직 전환 진행

붙 임 : 1. 관련공문  1부.

2. 합의서1부.

3. 변경 내역서1부.  끝