문서번호	공공재생과-8059
결재일자	2018.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울역재생계획팀장	공공재생과장
이유희		정병익	08/23 홍선기
협조

손기정 체육공원내 시설물 건설사업 발굴(표본)조사 용역

준공기한 연장 검토 보고

2018. 8.

도시재생본부

(공공재생과)

손기정 체육공원내 시설물 건설사업 발굴(표본)조사 용역

준공기한 연장 검토 보고

‘손기정 체육공원내 시설물 건설사업 발굴(표본)조사 용역’ 관련 표본조사 위치의 식재 복원 계획에 대한 협의 등으로 일정이 지연됨에 따라 준공기한을 연장하고자 함

Ⅰ		개 요

■ 사업 개요

□ 용 역 명 : 손기정 체육공원내 시설물 건설사업 발굴(표본)조사 용역

□ 용역기간 : 계약일로부터 50일('18.7.10.~'18.8.28.)

□ 용역금액 : 금16,489,000원(금일천육백사십팔만구천원)

□ 계약업체 : (재)한국고고학환경연구소(대표 : 이홍종)

□ 조사구역 : 서울시 중구 만리동2가 6-1번지 일대

□ 과업내용 : 표본조사

- 유구확인을 위한 발굴(표본) 조사

- 문화유적의 정확한 분포범위와 성격 규명, 유적의 향후 처리방안 도출

- 확인된 유구에 대한 학술적 기록 및 촬영, 보고서 작성 제출

Ⅱ		추진 경위

□ '18. 7. 2. : 문화재 발굴(표본)조사 추진계획

□ '18. 7. 3. : 수의계약 의뢰

□ '18. 7.10. : 용역 계약 및 착수

□ '18. 7.16. : 착수계 제출, 1차 현장답사

□ '18. 7.17.~'18.8.5. : 사전조사 실시, 혹서기 조사 중지

□ '18. 8. 6. : 2차 현장답사

□ '18. 8. 9. : 3차 현장답사

□ '18. 8.13. : 표본조사 2개소 실시

□ '18. 8.14. : 식재복원 문제 관련 조사중지 요청(중구청)

□ '18. 8.21. : 식재복원 관련 협의 완료(협의 결과 : 식재(맥문동) 원상 복귀)

□ '18. 8.22. : 준공기한 연장 요청(한국고고학연구소→서울시)

Ⅲ		검토 내용

■ 준공기한 연장 검토 내용

□ 준공기한 연장

- 당 초 : 2018.7.10. ~ 2018.8.28.

- 변 경 : 2018.7.10. ~ 2018.9.7.(10일 연장)

□ 연장 사유

- 혹서기 조사 중지, 표본조사 위치의 식재 복원 관련 협의 등으로 인한 지연

■ 검토 결과

□ 용역기간 변경

당 초	변 경	비고
2018.7.10. ~ 2018.8.28.	2018.7.10. ~ 2018.9.7.	※용역 기간 10일 연장 ※금액변경 없음

□ 지체상금 부과여부  미부과

□ 처리 의견  용역기간을 조정·변경 계약 처리코자 함.  끝.