문서번호	설비부-11647
결재일자	2018.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	건축설비과장
김진수	08/23 김은덕

『동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2018. 8.

도 시 기 반 시 설 본 부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일	2018년 08월 일
공 사 명	동작대로 (연장) 중앙버스전용차로 설치 전기공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 동작대로 방배경찰서 ~ 서울시계 - 규 모 : 가로등설비공사 1식, 신호등설비공사 1식, BIT 설치공사 1식, 무인단속장비 1식
	공사기간		2017. 12. 11 ～ 2018. 09. 30.
	감 리 사		㈜동성엔지니어링
	설 계 사		㈜석우엔지니어링
	시 공 사		㈜삼영기업
심의안건명			설계변경에 의한 금액증액			요청금액	증 156,963천원
심의요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 요청 ▢ 운반거리 변경
설계변경사항(요약) ◯ 내용 : 1) 가로등설비공사 이설수량 변경 및 전선관 배관 적용대가(야간→주간)변경에 따른 설계변경 2) 신호등설비공사 규제변경에 따른 설계변경 3) 토목공사에 따른 지장 검지선 재설치 비용 반영에 따른 설계변경 4) 교통운영과 현장점검 결과에 따른 과속단속카메라 1기 추가 설치에 따른 설계변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 주요변경내용 1) 가로등설비공사 이설수량 변경 및 전선관 배관 적용대가 변경에 따른 설계변경 2) 신호등설비공사 규제변경에 따른 설계변경 3) 토목공사에 따른 지장 검지선 재설치 비용 반영에 따른 설계변경 4) 교통운영과 현장점검 결과에 따른 과속단속카메라 1기 추가 설치에 따른 설계변경					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 777,552천원 - 변 경 : 934,516천원 - 증 감 : 156,963천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가로등 및 신호등 변경 - 무인단속카메라용 검지선 재설치등

▪ 주요변경내용                                                                           (단위 : 천원)

구분	공 종	당초 금액	변경 금액	증 . 감	변 경 사 유	설계 변경내용 요약
1	가로등 설비공사	90,683	84,951	-5,732	가로등 이설수량 및 전선관 적용대가 변경	▷이설수량 : 19본→24본 ▷적용대가 : 야간→주간
2	신호등 설비공사	218,977	240,242	21,264	유관기관(협의) 변경	▷버스전용신호등 적용 ▷맨홀규격 변경
3	BIT설치공사	91,431	81,365	-10,066	전선관 배관 수량 변경 적용대가 변경	▷전선관 배관수량 변경 ▷적용대가 : 야간→주간
4	다기능단속장비 설치공사	128,272	174,443	46,171	유관기관 요청	▷단속(과속)카메라 1기추가 설치
5	무인단속카메라 및 검지선설치(경찰청)	-	31,726	31,726	유관기관 요청	▷무인단속카메라 1기 이설 및 검지선 재설치 - 용도 : 신호·과속단속
6	교통신호제어용 검지선설치 (신호운영실)	-	28,280	28,280	유관기관 요청	▷신호제어용 검지선 재설치 - 용도 : 교통신호제어
7	교통량검시선 설치 (시설관리공단)	-	7,690	7,690	유관기관 요청	▷교통량측정용 검지선 재설치 - 용도 : 교통량 확인
8	버스전용차선 무인단속카메라 이설	-	14,841	14,841	유관기관 요청	▷버스전용차선 단속카메라 이설 1기 - 가로변 → 중앙정차대
9
10
11
12
13
14
15
소 계		529,363	663,538	134,174
제 경 비 등				22,789
도 급 공 사 비				156,963

첨부서류

설계변경 심의요청 자료 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	동작대로 (연장) 중앙버스전용차로 전기공사
계약금액	777,552,590원	계약일	2017. 12. 06	시공사	㈜삼영기업
공사기간	2017. 12. 11.～2018. 09. 30.	낙찰율	86.745%	설계자	㈜석우엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	㈜동성엔지니어링
공사규모	- 위 치 : 동작대로 방배경찰서 ~ 서울시계 - 규 모 : 가로등설비공사 1식, 신호등설비공사 1식, BIT 설치공사 1식, 무인단속장비 1식			※ 작성자 : (☎)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후(추가공사)	비 고
변 경 개 요	가동등 이설(19ea) 신호등 공사 1식 BIT설치 공사 1식 무인단속장비 1식		가로등 이설(25ea) 신호등 공사 1식 무인단속카메라 및 검지선 설치 과속단속카메라 1기 추가 설치 교통량신호 제어용 검지선 설치 교통량검지선 설치공사 버스전용차선 무인단속카메라 이설
공 사 비	777,552,590원		934,516,000원	증 156,963,410원
적 용 요 율	86.745%		낙찰율 86.745%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	낙찰율 적용
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행
설계변경 근거	방 침	설비부-
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 1.설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청 ⑨ 운반거리 변경
설계변경 내용	1) 가로등설비공사 이설수량 변경 및 전선관 배관 적용대가(야간→주간)변경에 따른 설계변경 2) 신호등설비공사 규제변경에 따른 설계변경 3) 토목공사 포장에 따른 지장 검지선 재설치 비용 반영에 따른 설계변경 4) 교통운영과 현장점검시 과속단속카메라 1기 추가 설치비 반영에 따른 설계변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진