투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기의뢰

1. 서울대공원 중점사업으로 추진중인 「공작마을 시설물 시설물 보수보강 공사」 및 「제3아프리카관 환경개선공사」에 대하여 아래와 같이 각각 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사내역                                                               (단위:원)

공 사 명	사업기간	계약금액	계약자	비고
공작마을 시설물 보수보강 공사	‘17.12.12. ∼ ’18.07.30.	*************	***** ******
제3아프리카관 환경개선공사 (장기-총차,1,2차)	총차: ‘17.12.15.∼’18.8.30. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.8.30. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.8.30.	계 : ************* 토목:************* 조경: ***********	【토목】 ***************** 【조경】 ********* ******

나. 준공기한 변경(연기) 내역

공 사 명	변경사항		비고
	당 초	변 경
공작마을시설물 보수보강 공사	‘17.12.12. ∼‘18.07.30.	‘17.12.12. ~ ’18.09.30.
제3아프리카관 환경개선공사 (장기-총차,1,2차)	총차: ‘17.12.15.∼’18.8.30. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.8.30. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.8.30.	총차: ‘17.12.15.∼’18.9.30. 1차 : ‘17.12.15.∼’18.9.30. 2차 : ‘17.12.15.∼’18.9.30.

· 귀책소재 : 서울대공원

· 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 준공기한 변경(연기) 사유

【공작마을 시설물 보수보강 공사】

- 예견치 못한 폭염 등 기상여건 악화로 작업능률저하 및 주 출입구 개선에 대한 추가 공종 발생으로 절대공기 부족.

【제3아프리카관 환경개선공사 (장기-총차,1,2차)】

- 예견치 못한 폭염 등 기상여건 악화로 작업능률저하 등 절대 공기 부족.

※ 관련근거 : 시장 긴급지시(′18. 8. 2.),행정안전부회계제도과-3720(2018.8.2.)호,재무과-36665(‘18.8.2.)호

붙임 :  1. 준공기한 연기 의뢰서 각 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고서 각 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	한상길		시설과장	08/24 오임석
협조자
시행	시설과-5228	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7440	/전송	02)507-7230	/		/	부분공개(7)