문서번호	시설보수과-4550
결재일자	2018.8.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		윤승범	08/24 이성재
협조

-제3처리장 소화조(C계열) 보수공사-

발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

-제3처리장 소화조(C계열) 보수공사-

발주계획 보고

우리센터에서 시행예정인 『제3처리장 소화조(C계열) 보수공사』에 대하여 아래와 같이 발주하여 사업시행에 철저를 기하고자 함.

1		사업개요

□ 사 업 명 : 제3처리장 소화조(C계열) 보수공사-중랑

□ 사업기간 : ‘18.09. ~ ’18.12.

□ 사 업 비 :**********

□ 공사내용 : 소화조(C계열) 방수ㆍ방식 3,404㎡, 균열보수 114m, 점검계단 설치  4개소

2		계약심사

□ 계약심사과-13709(2018.8.22.)호에 의해 해당 공사건은 추정금액 5억미만으로 ‘서울시 계약 심사 업무처리규칙 제4조2호가목’에 따라 계약심사 제외 사업으로 반려 통보

※ 소화조 계열별 분리발주 사유 : 본 공사는 주 공종이 폴리우레아 방수·방식 코팅 공사이며, 바탕온도는 최저 +5℃ / 최고 +30℃ 시공조건하에서 시행되어야 품질의 완벽을 기할 수 있는 공사로 동절기(12월) 이전에 방수ㆍ방식 코팅 공사를 끝내야 함으로 통합발주시 1개업체로는 절대공기 부족이 예상되어 계열별 분리 발주 시행.

3		공사발주

□ 입찰방법 : 공개경쟁입찰

□ 입찰참가자격

1) 건설산업기본법령에 의한 시설물 유지관리업을 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된영엽소가 서울특별시에 소재한 업체이어야 한다

2) 제3처리장 소화조(C계열) 보수공사는 『폴리우레아 바탕조정제 및 그를 이용한 폴리우레아 방수공법 (특허 제10********호)』을 적용

※ 본 입찰건과 관련하여 우리센터와 신기술(특허) 개발(보유)자가 신기술•특허 사용협약을 체결하였으며, 입찰참가자는 기술사용료 등 기술사용 협약사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하고 낙찰자는 계약체결 전까지 당해 신기술(특허)  개발(보유)자와 사용협약을 체결하고 신기술•특허 사용협약서를 제출

※ 특허보유업체 : 대한폴리텍㈜ ☎031-989-2357

□ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비                 수선유지교체비, 수선유지비

4		향후 계획

□ 2018.08. : 발주의뢰(긴급)

□ 2018.09. : 계약 및 착공

□ 2018.12.31 : 공사준공

붙임 : 1. 공사 시행계획 방침서 1부.

2. 제3처리장 소화조(C계열) 보수공사 설계도서 1부.

3. 계약심사 요청서 관련(공문서) 1부 끝.