문서번호	행정지원과-17672
결재일자	2018.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
백판종	代허홍석	이진우	08/24 최규해
협 조

□명품 아리수, 명품 강남수도!□

흡수식 냉온수기 냉각탑 충진재 수리(교체) 계획

2018년  8월

강남수도사업소

(행정지원과)

흡수식 냉온수기 냉각탑 충진재 수리(교체) 계획

우리 사업소 본관 기계실 흡수식 냉온수기 냉각탑 충진재의 부식으로 냉각탑 가동에 영향을 끼쳐 교체하고자 함.

□  기계실(본관) 현황

□ 냉․난방 시설(흡수식냉온수기)

명칭(형식)	제작사	규격 (용량)	설치년도	설치업체	공급장소	연료
흡수식냉온수기 BUD-100	범양냉동공업(주)	100 RT	2005.06	리얼공조(주)	1~4층 사무실 및 구내식당 냉난방	LNG

흡수식냉·온수기(본관)	냉각탑(본관 옥상)	냉각탑 충진재(필러)

□  냉각탑 고장내용

□ 본관 기계실 흡수식 냉온수기 냉각탑 충진재(460장) 노후화로 인하여 냉각탑 열교환이 잘 되지 않아 흡수식 냉온수기 가동에 영향을 끼침

□  수리(교체) 개요

□ 위치: 청사 본관 옥상 냉각탑

□ 수리내역: 흡수식냉온수기 냉각탑 충진재 교체

- 충진재(순정품) 460장 교체

- 필러접착작업

- 루바 4셋트 교체

- 폐기물 6㎥ 처리

- 자재 운반 및 옥상 하역작업(사다리차1, 트럭1) 등

□ 수리기간: 2018. 8. 29 ~ 8. 30

□  예산 현황

□ 소요예산: ***********

- 재료비: 2,760,000원

- 노무비: 972,940원

- 경비: 447,950원

- 부가가치세: 418,090원

□ 계약방법: 수의 1인견적(전자시담)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률시행령 제30조 제1항 제2호

※ 금액이 소액이고 폭염으로 인하여 긴급 수리를 요하는 사업

□ 계약업체: ********

- 주소: ************************

- 대표: ***

- 업종: ********

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,수선유지비

□  향후 일정

□ 설계 ․ 발주 : 2018. 8. 28

□ 계 약 일 : 2018. 8. 29

□ 공사 기간 : 2018. 8. 29 ~ 8. 30

□ 준 공 일 : 2018. 8. 31

□  행정 사항

□ 수리(교체)전 관련업체 자문 등 사전준비 철저

□ 예산낭비 사례가 없도록 유념하여 설계 및 수리

□ 하자 및 사고가 발생하지 않도록 감독 규칙 준수 철저

□ 수리(교체)후 시설물관리 철저