등록번호

토목과-12153

주무관

도로굴착팀장

토목과장

안전건설교통국장

등록일자

2018.8.24.

김현주

조성주

김영철

08/24

이경우

결재일자

2018.8.24.

공개구분

부분공개(5)

협  조

기획예산과장

강환복

예산팀장

송월섭

아름다운변화, 열린구정, 행복도시 서대문

2018년 도로굴착복구 및 도로정비공사(연간단가)

낙찰차액 사용계획 보고

서 대 문 구

토목과

2018년 도로굴착복구 및 도로정비공사(연간단가) 낙찰차액 사용계획 보고

『2018년 도로굴착복구 및 도로정비공사(연간단가)』 공사관련 포장종류에 따른 원활한 굴착복구를 위하여 낙찰차액 사용에 대한 보고임

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2018년 도로굴착복구 및 도로정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : ‘18. 3.  9. ~ ’18. 12. 31

□ 도 급 자 : 주식회사 리치힐건설 대표 노창원

□ 공 사 비 : 634,054천원 (도급비 534,054천원, 관급비 99,998천원)

Ⅱ		추가예산 소요내역

□ 공사 설계변경(증액) 내역(증 금59,423,120원)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총 공 사 비	634,053,180	693,476,300	증 59,423,120
도 급 비	534,054,990	534,054,990	-
관 급 비	99,998,190	159,421,310	증 59,423,120

□ 주요공종 물량변경 내역

- 포장종류가 A-2인 구간의 복구와 도로 전체포장물량 증가에 의하여 관급자재 추가 필요

- 가로등 개량공사구간 복구에 의한 보도구간 복구물량 증가 예상

□ 관급자재 물량변경

- 포장종류 A-2(아스팔트포장) 구간의 물량증가로 아스콘추가확보 : 47,283천원

- 가로등 공사 등 소형고압 및 인조화강블럭 추가 확보 : 12,139천원

Ⅲ		조 치 계 획

□ 추가 소요예산 59,423천원을 낙찰차액에서 이용하여 공사추진(기획예산과 협조요청)

- 낙찰차액 : 85,945,010원(도로굴착복구기금)

□ 변경사항을 반영하여 관급자재 구매하여 공사추진(도급비 변경없음)

□ 예산과목 : [도로굴착복구기금]도로, 도로인프라 확충·정비, 도로기능복구, 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경(제2회) 내역서 1부.  끝.